문서번호	건설안전과-10383
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	안전점검팀장	건설안전과장		도시안전기획관
성운용	代박철규	최갑영		07/16 권기욱
협 조

「용산구 공사장 인접 석축 붕괴사고」관련

현장 긴급 안전점검 결과보고

2015. 7.

도시안전본부

(건설안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	서울시 안전관리자문단
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	현장 안전점검
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	1개 자치구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「용산구 건축공사장 인접 석축 붕괴사고」관련

현장 긴급 안전점검 결과보고

7.14(화) 발생한 용산구 건축공사장 인접 석축 붕괴사고 현장에 대해 민간전문가 긴급안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 사고개요

❍ 일    시 : ‘15. 7. 14(화) 19:40경

❍ 위    치 : 용산구 용문동 38-88 주택 석축(일명 ‘88주택 석축’)

❍ 내    용 : 신축공사장(용문동 38-125)의 흙막이 공사 전 ‘88주택’측 석축 기단부 정리 및 천공작업 후 석축 붕괴(H=6m, L=12m)

❍ 피해여부 : 인명·재산 피해 없음(13세대, 35명 주민 전원 대피)

□ 사고발생 위치도

석축 붕괴사고

신축공사장

(용문동38-125)

88주택

(용문동38-88)

붕괴 석축

□ 긴급 점검개요

❍ 점검일시 : ‘15. 7. 15(수) 16:00~18:00

❍ 점 검 자 : 외부전문가 및 공무원(건설안전과) 등 3명

(토질및기초 기술사 조성하(서울시 안전관리자문단))

❍ 점검내용 : 사고발생 원인파악 및 붕괴된 석축 보강방안 등

□ 점검결과

❍ 현 황(1983년 축조)

- 석축 상부가 텃밭으로 활용중이나 지표수가 침투되어 수압을 가할 정도는 아니라고 판단.

- 석축 내부 공간이 충진되지 않아 외부 진동이나 충격에 취약한 구조가 내포된 상태로 판단.

❍ 사고발생 원인(육안점검)

- 사고전일 석축 하단부에 H-pile 시공을 위해 1m 간격(D=450mm)으로 구덩이 천공

- 석축기초 상태 확인을 위해 석축 하단부를 1m 정도 굴착

- 이로 인해 석축구조가 손상되고 후방 성토부분이 붕괴된 것으로 추정.

❍ 현장 응급조치 및 사후 조치계획

- 사고당일 지반 붕괴방지를 위해 톤마대 쌓기 시작, ‘15.7.16일 완료 예정

- 구조적 안정성을 강구하기 위해 옹벽 설계 실시

(※자세한 사항은 ‘붙임1’의 점검의견서 참조)

□ 사고현장 사진

사고발생 현장사진	서울시(건설안전과) 긴급점검 (7.15(수))

‘88주택’

❍ 점검결과 조치

- 점검 결과를 해당 재난관리책임기관에 통보하여 보강방안 등 사후대책 강구 요청

- 주택 및 석축 등과 인접한 소규모 신축공사장에 대해 안전점검 실시

· 표본점검 : 건설안전과 실시(‘15.7.20 ~ 7.31)

· 전수점검 : 주택건축국(건축기획과)

□ 행정사항

❍ 안전점검 수당 지급

예산과목 : 도시안전본부 하천관리과, 치수 및 하천관리, 치수사업,

재난예방(재난관리기금 재난계정), 일반운영비, 사무관리비

지급금액 : 249,900원

· 엔지니어링기술자 노임단가 : 한국엔지니어링협회가 공표한 특급기술자의 기술단가표

(정책 2015-115호)에 따른 지급(※붙임2)

점검수당 지급 방법 : 점검위원 계좌로 입금

붙임 : 1. 외부전문가 점검 의견서 1부.

2. 엔지니어링기술자 노임단가(한국엔지니어링진흥협회) 1부.   끝.