문서번호	토목부-15489
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목총괄과장	토목부장		시설국장
오열상	서관석	노우성		07/27 형태경
협 조
	주무관		장기철

월드컵대교 북단 매립폐기물 처리보고

(월드컵대교 건설공사)

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

월드컵대교 북단 매립폐기물 처리보고

월드컵대교 건설공사 북단IC 구역은 난지도 쓰레기 매립으로 굴착구간에서과거 매립폐기물이 다량 발견되어 분리·선별을 강화하고 순환골재와 혼합 재활용하여 처리비가 고가인 폐기물량을 최소화 하여 예산절감한 사항을 보고하는 사항임(예산절감 : 982백만원)

공사개요

❍ 규  모 : 폭 31.4m(왕복6차로), 연장 1.98Km

❍ 도급액 : 176,826백만원

❍ 시공사 : 삼성물산(주)외 2개사

❍ 감리사 : (주)포스코엔지어링외 1개사

보고내용

❍ 과거 매립폐기물 처리 관련규정

- 건설폐기물 처리 및 재활용 관련  업무처리 지침(환경부예규 제471호, ‘12.10.29)

❍ 매립폐기물 처리방법 개선

구분	당초설계	1차 보고 (‘14. 12)	2차 보고 (금회)	비고
처리 방법	- 사토처리 (폐기물수수료만 반영)	- 성상을 구분하여 폐기물 처리 - 일부 재활용토로 사용	- 품질시험값을 토대로 재활용토사 사용을 최대한 늘림 · 순환골재, 재활용토사 혼합비율의 조정과 토성시험, 다짐시험을 통한 재활용 토사량 극대화 - 분리·선별을 강화하여 처리비가 고가인 폐기물량 최소화
소요 금액	54억원	47억원 (△7억원 절감)	37억원 (△약10억원 절감)

❍ 매립폐기물 재활용을 위한 단계별 판단기준 도입

단계	판정내용	판정기준	판정결과
1단계	재활용토사 사용범위 결정	노체사용여부 판단 (시험시공 1차 결과로 판단)	재활용토사 노체사용 → 불가
□
2단계	주1)혼합토사 사용시 품질확보 여부	혼합토사 시험시공으로 노체.노상 사용여부 결정 (2차(PBT)결과로 판단)	혼합토사로 노체.노상 사용 → 가능
□
3단계	외부토 사용 (보강토옹벽 뒷채움토)	시방기준 만족 및 경제성 분석 뒷채움토사로 적합여부 검토 무대토 반입 검토	뒷채움토사 사용→ 불가 → 외부 무대토 반입(시방기준 만족 및 경제성 확보)
□
4단계	폐기물처리방법 결정	· 재활용 토사량의 극대화 · 분리선별 절차를 강화하여 처리비가 고가인 폐기물량 최소화	순환골재 + 재활용토사 혼합비율 조정을 통한 시방기준에 적합한 재활용 토사량 최대화

※ 주1) 혼합토사 : 재활용토사와 순환골재를 일정비율로 교반한 토사

- 재활용토사 · 순환골재 혼합비율 및 사용수량

구 분	단위	설계량 (성토)	재활용토사		순환골재	비 고
			사용범위	사용수량
노체	㎥	12,163	70%	8,515	3,648(30%)
노상	㎥	7,679	30%	2,304	5,375(70%)
뒷채움토	㎥	3,258	-	-	-	외부 무대토
되메우기	㎥	18,134	100%	18,134	-
계	㎥	41,234		28,953	9,023

❍ 매립폐기물 발생 및 처리현황

매립 폐기물 발생량(A)	재활용 수량(B)	폐기물 처리량 (A-B)	비 고
113,721 ton	49,510 ton (28,953㎥)	64,211 ton	재활용률 : 44%

※ 보통의 경우는 100% 폐기물 처리함(처리수수료 + 운반비 등의 비용 발생)

❍ 매립폐기물 처리방법 변경에 따른 공사비 검토

구분	규격	소요공사비 (백만원)		증 · 감	비고
		당초	변경
1. 폐기물상차비		223	254
2. 운반비	폐토사, 혼합건설폐기물, 사업장폐기물(매립,소각)	792	526
3. 폐기물처리비	폐토사, 혼합건설폐기물, 불연성폐기물(매립), 가연성폐기물(소각)	2,750	2,109
4. 선별비	가연성 선별(수작업)	388	214
5. 기 타		60	217
소 계		4,213	3,320
부가세		42	332
계		4,634	3,652	감) 982

검토의견

❍ 매립폐기물 처리방안 개선을 통한 폐기물의 적정처리 → 예산절감

- 매립폐기물을 재활용토로 활용하기 위해 순환골재를 혼합하고 토성시험,  다짐시험을 반복하여 품질확보 가능 방안을 채택하여 노체와 노상에 시용하고

- 굴착과정에서 분리·선별을 강화하여 처리비용이 비싼 가연성(소각) 매립폐기물 발생량을 최소화 시키고 → 처리비용이 저렴한 폐토사 발생량을 증대시켜 → 예산절감

조치계획

❍ 추후 본부 내 설계변경자문위원회 심의를 거쳐 계약금액을 조정하고 관련 부서에 사례 전파(도급비 감액 : 982백만원)

붙 임 : 실정보고 공문 1부. 끝.