문서번호	시설과-3914
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김재희	임록화	代임록화		08/10 이춘희
협 조
	주무관		이전호

「몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성공사」

실정사항 검토 및 설계변경 보고

2015. 8

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성 공사」

실정사항 검토 및 설계변경 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성공사

○ 공사기간 : 2014. 12. 23 ~ 2015. 08. 30

○ 도 급 액 : 금97,800,900원(금구천칠백팔십만구백원)

○ 도 급 자 : 거목건설 주식회사  대표 권정호

□ 실정사항 보고

가. 현지 조사 보고

○ 조사일시 : 2015. 7. 3.

○ 조사내용 : 몽골측 요청사항에 대한 시공사 현지조사 보고

- 탄성포장재 수급 가능여부

- 산책로 경화포장 설계변경 가능여부

- 수목 추가식재 가능여부 및 수급가능 수목 조사

○ 조사결과

- 조합놀이대 탄성 기준에 부합하는 규격의 탄성포장재(T50) 현지수급 불가

- 산책로 경화포장 설치 가능 (레미콘 수급가능)

- 수목 추가식재 가능

※ 수급가능수목 : 구주소나무(H3.0xR10), 몽골벚나무(H3.0xR10), 조팝나무(H0.8xW0.4) 등

나. 실정보고 세부내역

(단위 : 천원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
식재	▶ 녹지면적대비 식재수량 부족	▶ 현지 수급가능한 수목 식재(몽골측 요청사항) - 구주소나무(H3.0*R10) : 0주 → 9주 - 몽골벚나무(H3.0*R10) : 0주 → 6주 - 조팝나무(H0.8*W0.4) : 0주 → 270주 - 잔디(SEED SPRAY) : 299㎡ → 0㎡	증 14,795
포장	▶ 대륙성기후로 인하여 건조하고 바람이 많아 먼지에 취약	▶ 비산먼지 방지를 위한 산책로 경화 포장처리 (몽골측 요청사항) 및 경계석 규격 통일 - 흙다짐포장(T100) : 122.3㎡ → 0㎡ - 녹지경계석(T150) : 79.3m → 164.8m - 모래막이(T200) : 85.5m → 0m - 콘크리트포장(T150) : 0㎡ → 122.3㎡	증 1,094
우배수	▶ 현지 지반조건상 맹암거 공사 불필요	▶ 현장 여건에 맞게 설계변경 - 집수정(500*500) : 1개소 → 0개소 - 연결관(D500) : 4m → 0m - 맹암거(간선,D150) : 35m → 0m - 맹암거(지선,D100) : 45m → 0m	감 3,823

□ 소요예산 내역(증 13,046,100원)

(단위 : 천원)

구 분	소요 금액			비고
	당 초	금회	증 / 감
총 공 사 비	97,800,900	110,847,000	증 13,046,100
공 급 가 액	88,909,909	100,770,000	증 11,860,091
부 가 가 치 세	8,890,991	10,077,000	증 1,186,009
도 급 공 사 비	97,800,900	110,847,000	증 13,046,100

○ 공사기간 : 변경없음

□ 검토의견

○ 몽골측에서 서한문(공원조성과-5372호/ 2015.4.24.)으로 요청한 사항에 대하여 설계변경 검토내용 및 추가예산을 국제교류담당관에 요청하였으나, 예산배정이 지연되어

○ 현지 수급이 불가능한 탄성포장재는 8월 말 준공기한 내 설치가 불가능한 실정임

○ 현장내 매설된 기존 배수관은 별도의 설계변경 없이 이설

○ 상기 공사의 각 항목별 실정보고 사항에 대하여 이설비 잔여예산(14백만원)을 활용하여 설계 변경 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 실정사항 보고(공문) 1부.

2. 변경내역서 1부. 끝.