투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매공원 시설물 정비공사(보라매 둘레길 조성) 관급자재 변경 구매

1. 시설과-4476(2015.9.7.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보라매공원 시설물 정비공사(보라매 둘레길 조성)』과 관련하여 아래와 같이 관급자재를 변경 구매하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 보라매공원 시설물 정비공사(보라매 둘레길 조성) 관급자재 변경 구매

나. 소요금액 : 금4,967,680원

다. 추가 구매 요청

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
22550349	식생매트	W1000*T35mm	㎡	102	32,500	3,315,000	야자매트
22415645	안내판	600*900mm, 둘레길안내판	개	1	1,626,000	1,626,000	구간안내판
	소 계					4,941,000
	합 계					4,941,000
	조달수수료	0.54%				26,680
	총 계					4,967,680

라. 납품장소 : 우리시 지정장소

마. 납품기한 : 2015. 9. 15일까지

바. 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비

사. 변경 계약 요청

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단위	수량 (기존)	수량 (변경)	납품기한 (기존)	납품기한 (변경)	비 고
22415647	안내판	450*600mm, 둘레길안내판	개	5	4	2015.9.10	2015.9.15	이용안내판
22415653	안내판	180*790mm 둘레길안내판	개	15	15	2015.9.10	2015.9.15	방향안내판 (지주형)
22415204	안내판	600*120mm, 방향안내	개	12	12	2015.9.10	2015.9.15	방향안내판 (기존안내판부착)

붙  임 : 1. 실정사항 검토 및 설계변경 보고 1부.

2.녹색제품구매적용가능검토서 1부.   끝.

주무관	김재희		시설팀장	임록화		시설과장	09/08 진병규
협조자	주무관	김일환		주무관	이전호
시행	시설과-4492	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개