투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	한국토지주택공사 사장(주택사업2부장)
(경유)
제목	교통안전시설(신호,안전표지) 원인자부담공사 공사기한연장 승인(강남보금자리주택지구)

1. 한국토지주택공사 서울지역본부 강남사업단-543(2014.01.14.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하고 있는『강남보금자리주택공사 관련 교통안전시설(신호,안전표지) 원인자부담공사』의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대해 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 강남보금자리주택공사 관련 교통안전시설(신호,안전표지) 원인자부담공사

나. 공사장소 : 강남구 자곡동,세곡동,율현동 일대

다. 공사내용 : 강남보금자리주택 조성에 따른 교통안전설치

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 당 초 : 2012.09.01. ~ 2013.12.31.

- 변 경 : 2012.09.01. ~ 2014.09.30.

- 공사(준공)기한 연장사유 : 시설물 인계인수 관련 추가요구사항 및 점검사항 조치일정 고려. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
★주무관	김동현		기전과장	01/20 김대진
협조자
시행	기전과-753	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개