투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「서울가정행정법원 옥상녹화·텃밭조성 사업」설계변경 시행

1. 시설과-4984(2015.10.6.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『서울가정행정법원 옥상녹화·텃밭조성 사업』에 대하여 아래와 같이 설계 변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울가정행정법원 옥상녹화·텃밭조성 사업

나. 도 급 액 : 금202,284,000원(금이억이백이십팔만사천원)

다. 공사기간 : 2015. 08. 12 ~ 10. 10

라. 도 급 자 : 천지조경(주) 대표 정국선

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	소요 금액			비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	231,852,400	224,985,420	감6,866,980
공 급 가 액	183,894,546	181,226,364	감2,668,182
부 가 가 치 세	18,389,454	18,122,636	감266,818
도 급 공 사 비	202,284,000	199,349,000	감2,935,000
관급자재비	29,568,400	25,636,420	감3,931,980

바. 예산과목(건물관리기관 자부담금 50%)

- 조경과, 생활주변녹지확충 및 시민참여활성화, 시민참여녹지조성, 옥상녹화 텃밭조성, 시설비(401-01)

- 건물관리기관 자부담금 : 세입세출외현금

붙  임 : 1. 실정사항 검토 및 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	임록화		시설과장	10/06 진병규
협조자	주무관	지정희		주무관	이전호
시행	시설과-5004	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개