투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	양화한강공원 친수공간 조성공사 관급자재 납품기한 연기 요청

양화한강공원 친수공간 조성공사에 사용할 관급자재(기타화초-식물매트)의 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 건   명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사 관급자재 조달구매

2. 납품기한 연기요청 내역

구분	품 명	계 약 자	납품요구일	납품기한		비고
				당 초	변 경
1	기타화초(물억새, 식물매트)	지엔지농원	2013.12.06	2014.01.30	2014.10.26
2	기타화초(수크령, 식물매트)	지엔지농원	2013.12.06	2014.01.30	2014.10.26

3. 변경사유 : 자재 투입시기 미도래

붙임 : 1. 납품기한 연기 의뢰서 1부.

2. 납품기한 연기검토 보고서 1부.  끝.

	생태공원과장
주무관	양순옥		생태공원과장	01/20 이해룡
협조자
시행	생태공원과-137	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	3780-0864	/전송	3780-0745	/	oksnow@seoul.go.kr	/	대시민공개