문서번호	누수방지과-11217
결재일자	2015.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이동욱	김영삼	12/31 강신재

배급수관정비공사 추진실적 보고(11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

상수도사업본부

시설안전부

2015년 11월 배급수관정비공사 추진실적 보고

2015년도 배급수관정비공사 공정관리 등 사업추진이 원활히 진행될 수 있도록 11월 추진실적을 보고 드림.

□ 현  황

○ 정비목표 : 54㎞

○ 사 업 비 : 45,500백만원

○ 발주건수 : 32건

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
발주대상 (건수)	32	6	4	4	4	3	4	3	4
정비계획 (㎞)	54	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3	6.5
사업비 (백만원)	43,594	8,419	4,096	6,489	4,074	4,751	6,218	4,311	5,236

※ 감리비 1,900백만원, 시설부대비 6백만원 제외

□ 추진실적

○ 11월말 현재 정비실적 : 56㎞

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	54	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3	6.5
전월누계	53.6	9.8	5.2	8.2	5.6	5.8	7.6	5.3	6.1
당월실적	2.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.4	0.5	0	0.4
실적누계	56	10.4	5.3	8.5	5.7	6.2	8.1	5.3	6.5
정비율(%)	103.7	100	103.9	104.9	114.0	105.0	105.1	100	100

□ 향후계획

○ 2015년 노후관 정비공사 추진실적 최종 확정후 통계에 반영.  끝.