투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(2015 하반기 옥상녹화 텃밭조성공사)

1. 녹지관리과-11633(2015.12.09)호 및 공원운영과-23692(2015.12.14)호와 관련입니다.

2. 「2015 하반기 옥상녹화 텃밭조성공사」관급자재에 대하여 아래와 같이 납품 기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재 조달구매(2015 하반기 옥상녹화 텃밭조성공사)

나. 납품기한 연기 요청내역

물품식별 번 호	품명	규격	단위	수량	단가	금액	납품기한		비고
							당초	변경
22705232	야자매트	T20,W1.0	m	55	29,000	1,595,000	2015.01.09	2016.03.20
22230259	목재판재	모말라 T30xW120	㎡	58	60,500	3,509,000	2016.01.04
22415364	안 내 판	W300xH350xT30	EA	2	220,000	440,000	2016.01.19

다. 연기사유 : 현재 동절기 공사를 할 수 없어 공사 예산이 사고이월됨에 따라 본 공사 추진일정에 맞춰 납품기한 연기.  끝.

	녹지관리과장
주무관	이은국		주무관	박병구		녹지관리과장	12/31 김윤철
협조자
시행	녹지관리과-12231	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5948	/전송	02-3783-5949	/	jamijean@seoul.go.kr	/	대시민공개