문서번호	배수과-9454
결재일자	2015.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
신근호	이임섭	이규상	정중곤		12/31 한국영
협 조
	경영관리부장			정진일
	기획예산과장			최생인

2016년도

노후 송∙배수관 정비사업 계획

2015. 12

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년도

노후 송∙배수관 정비사업 계획

내구연한이 경과된 노후 송▪배수관으로 내부라이닝이 되지않은 회주철관과 누수가 발생한 콜타르에나멜 강관을 정비하여 고급화된 수돗물 아리수를 깨끗하고 안전하게 각 가정까지 공급하고자 함.

Ⅰ. 추진방향

❍ ’16년 정비목표 : 400mm이상 노후 송▪배수관 20km 정비

❍ 노후 송▪배수관정비사업 현황

구 분	총 계	기투자 (’84~’15년)	2016년	2017～ 2018년
연장(km)	678	594	20	64
사업비(억원)	10,625	8,776	395	1,454

※ 2015년 사업비 및 정비실적 : 375억원, 18.0km

❍ 노후 송▪배수관정비 사업대상 우선순위

- 내부라이닝이 되어있지 않은 녹발생이 많은 회주철관

- 인체 유해성 논란이 있는 콜타르에나멜강관

- 내용연수(30년이상)가 경과된 관으로 누수 및 수질사고가 많이 발생하는 관

- 정수장 및 배수지간 비상관로 노후관 정비

Ⅱ. ’16년 사업대상 심사

❍ 사업대상 신청현황 : 53건, 109,111백만원

❍ 사업대상 우선순위

- 400mm이상 내부라이닝이 되지않은 회주철관으로 도로굴착 승인이 가능한 구간

- ’85년까지 부설한 강관중 유해성 논란이 되고 있는 콜타르에나멜관으로 내부코팅이 되어있고 잦은 누수가 발생한 관

- 이물질 및 적수발생으로 민원이 발생하여 정비가 필요한 노후된 강관

- 뚝도정수장 비상급수와 관련 강북(월곡) ⇒ 뚝도(대현산)으로 급수지원을 위한 청계천 횡단 노후관 정비

❍ 노후관 정비물량

- 정비물량 : 노후 송▪배수관 20.0km

∙ 회주철관 10.3km(폐쇄관1.7km포함), 콜타르에나멜강관 11.4km

※ ’15년도 기준 : 회주철관 19.8km, 강관 433km

❍ 사업소별 대상사업 심사결과

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부 민원 발생 등 긴급 추가사업 예비비 1,340백만원	기타 공기관 등에 대한 대행사업비 1,090백만원, 시설부대비 20백만원
건수	24	3	1	5	3	3	2	3	4	-	-
연장 (km)	20.0	2.9	0.7	3.4	2.3	2.6	0.8	4.1	3.2	-	-
예산액 (백만원)	39,500	5,250	1,400	9,400	3,900	5,600	1,500	4,900	5,100	1,340	1,110

Ⅲ. ’16년 예산 집행계획 및 추진일정

❍ 총 사업비 : 39,500백만원

❍ 집행계획

- 회주철관 및 콜타르에나멜 강관 정비 ------------ 33,850백만원

- 청계천 횡단(D=900mm) ---------------------- 3,200백만원

- 공기관 등에 대한 대행사업비 -------------------- 1,090백만원

- 본부(포괄비) ---------------------------------- 1,340백만원

- 시설부대비 ---------------------------------------- 20백만원

총 계 ---------------------------------------- 39,500백만원

❍ 추진일정

- 현장조사 및 설계 : 2015. 1월 ~ 3월

- 계약심사 및 발주 : 2015. 3월 ~ 4월

- 계약 및 착공 : 2015. 4월 ~ 5월

- 상▪하반기 송배수관 현장 점검 : 2015. 6월, 10월(별도 계획 수립 추진)

붙임 : 1. 2016년 송▪배수관정비 사업 검토(총괄) 1부.

2. 2016년 송▪배수관정비 사업 검토결과 1부.  끝.