투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「서울 한양도성 경관저해시설 정비공사」공사 일시중지 지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시공 중인「서울 한양도성 경관저해시설 정비공사」에 대하여 아래와 같이 해당기간(동절기 공사불능일) 동안 공사 일시중지를 지시하니, 불의의 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 안전관리, 현장시설물 관리 등을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

□ 공사 일시중지 기간 : `16.01.01~`16.2.14 (총 45일)

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	원택건설(주) 대표 오원진 귀하(서울시 광진구 천호대로 597번지), 한양도성 경관저해시설 정비공사 현장대리인 귀하
주무관	김현지		문화시설과장	안연수		건축부장	01/04 안재혁
협조자
시행	건축부-76	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (프리미어 플레이스빌딩) 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개