문서번호	건축부-70
결재일자	2016.1.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
정제국		박범규	전결 01/04 안재혁
협 조

공사관계자 착수회의(Kick-off Meeting) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

도시기반시설본부

(건  축  부)

공사관계자 착수회의(Kick-off Meeting) 결과 보고

「성동소방서 신축공사」공사관계자가 참석하는 착수회의(설계설명회) 개최결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				설명회 개요

□ 일    시 : 2015.12.29.(화) 14:00

□ 장    소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

□ 참 석 자

○ 본    부 : 건축총괄과장, 분야별 담당자(건축, 기계, 전기, 조경)

○ 의뢰부서 : 광진소방서 장비회계 팀장 외1

○ 시 공 자 : 누비종합건설(주) 대표이사 외1

○ 감 리 자 : 책임건설사업관리자 외2(펨코엔지니어링 외1개사)

○ 설 계 자 : 제이유건축사사무소 이서구 이사

□ 회의내용

○ 사업개요 설명

○ 설계의 주안점, 공사중 유의사항

○ 현장개설계획, 공정계획 등 향후 시공계획

○ 감리계획 및 공사중 협조사항 협의 등

□ 회의사진

Ⅱ				주요논의 내용

□ 가설현장 사무소 개설 관련(시공자)

- 1.25일 공사착수전까지 성동구청과 도로점용 등 협의하여 현장 개설 완료

□ 공사착수 관련(감리자)

- 공사착수전까지 관급자재 공급일정, 착수계 준비, 설계 개선사항 등 협의 완료

- 공사진행중 재시공 사항이 발생하지 않도록 사전교육 및 설명

□ 공사진행중 당부사항(발주청)

- 우리본부(안전관리과) 불시기동반 점검 대비 및 항시 현장관리 철저요망

- 우기전 지하층 골조공사를 완료할 수 있도록 공정관리

- 가설사무소는 공정간 간섭이 없는 위치에 설치

- 안전 및 품질시험 서류는 내용을 충실히 작성

- 공사착수와 동시에 경계명시측량 실시

- 지열공사와 간섭이 없도록 진입구 설치 바람(설비부) 등

Ⅲ				행정사항

□ 주요 논의사항은 공사착수계획에 반영(착공서류 제출시 징구 및 확인)

○ 공사 착수전 현장개설 및 진행사항 확인

□ 향후계획

○ 2016. 01. 08.    건설사업관리용역(감리) 착수

○ 2016. 01. 25.    공사착수(16개월)

○ 2017. 05. 24.    공사준공

○ 2017. 06.        시설물 인계인수

따로붙임 : 설계설명회 회의록 1부.  끝.