투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달구매 납품기한 연기요청(레미콘)

1. 공원운영과-24615(2015.12.28.)호와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사와 관련, 관급자재(레미콘) 구매건에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사 레미콘 구매

나. 납품기한 연기 요청내역

물품식별 번 호	품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)	납품기한		비고
							당 초	변 경
계		4종				9,099,110	‘16.1.12	‘16.9.30
10063090	레미콘	25-18-80	㎥	102	57,170	5,831,340
10063091		25-18-120		20	58,180	1,163,600
10063094		25-21-80		23	61,360	1,411,280
10063096		25-21-120		11	62,990	692,890

다. 변경사유 :  장래 차수(2차) 공사시행에 따른 납품기한 연기. 끝.

	시설과장
조경팀장	남상국		시설과장	01/04 김한준
협조자
시행	시설과-10	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5966	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개