투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(지하철9호선 920공구-신호)

1. 서울특별시도시기반시설본부 도시철도토목부-16712호(2015.12.31.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하고 있는「지하철9호선 920공구 건설공사 교통신호기 원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인 요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

가. 공 사 명 : 지하철9호선 920공구 건설공사 교통신호기 원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 방이사거리, 방이중학교, 올림픽공원 남4문사거리

다. 공사내용 : 교통신호기 철거 및 이설

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 연장사유 : 사업기간 연장에 따른 공사기간 조정

- 당 초 : 승인일 ~ 2015. 12. 31.

- 변 경 : 승인일 ~ 2016. 12. 31..  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	01/04 남궁영주
협조자
시행	기전과-21	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개