문서번호	급수운영과-1379
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
정기성		정재풍	01/20 김수영
협 조

「중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사」

실시설계용역 설계내역 변경시행 보고

2014. 1.

북부수도사업소

급수운영과

「중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사」

실시설계용역 설계내역 변경시행 보고

우리사업소에서 시행 예정인 『중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사』의 실시설계용역 시행과 관련하여 변경사항이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

관련 근거

급수운영과-723(2014.1.13.)

「중랑천 횡단 상수도관 이설공사 실시설계용역 시행계획 보고」

급수운영과-802(2014.1.10.)

「기술용역타당성 심사요청」

기술심사담당관-683(2014.1.14)

「제40차 기술용역타당성 심사결과 통보」

용역 현황

용역명 : 「중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사」 실시설계용역

개  요 : D=800mm L=100m 하천횡단

용역기간 : 2014. 2. 1. ~ 3. 31

예산액 : 47,000,000원

변경 내용

(단위:천원)

공 종	변경 금액 및 사유		총 용역비
			변경 전	변경 후
토질조사 (시추, 현장 및 실내 시험)	- 15,000	내역 삭제	47,000	32,000

지반정보지스템 기초자료

노원교 인근 기초자료 확보가능 시추지점

이설공사 시행지점 지층 추정단면도

활용가능 기초자료

시추공의 주상도 및 과업일반정보, 표준관입시험 자료, 시추단면도, 이설지점의 추정단면도 등

관련 법령

건설기술관리법시행령	제6장 지반조사 - 제29조(지반조사의 항목 및 기준) ④ 발주청은 기존 활용가능한 지반조사 자료가 있을 경우에는 이를 활용할 수 있으며, 이 경우 그자료의 출처를 명기하여야 한다.
기본설계등에 관한 세부시행기준

조치 의견

상수도관 이설공사 시행에 앞서 시추작업 등 지반조사를 통해 지반의 특성을 파악하여 적정한 시공방법을 선정하고 설계에 반영할 수 있지만, 관련 법령에 대한 세부시행기준을 근거로 서울시에서 운영하는 지반정보시스템의 기초자료를 활용하여 설계에 반영하고 현장지반조사를 대체하고자 함.

따라서 우기 전에 준공 완료해야 하는 시급을 요하는 공사로 설계시 신뢰도가 높은 서울시 지반정보시스템의 자료를 활용함으로써 설계용역 기간을 단축하고 15,000천원의 예산절감 효과를 기대할 수 있음.

첨부 : 설계 내역서 1부. 끝.