투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	폐기물처리용역(3차) 준공기한 연기요청〔지하철919공구〕

1. 우리본부에서 시행중인 『지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 폐기물처리용역

나. 계 약 자 : 문화기업(주)  대표 김태흔

다. 용역개요 : 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 폐기물 처리

라. 용역기간 : 2013.01.30 ~ 2014.01.21

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

바. 준공기한 연기내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
3차	계약금액	180,000,000	180,000,000	내역변경 없음
	기 간	’13.01.30~’14.01.21	’13.01.30~’14.02.20	연 기

따로붙임 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기 의뢰서(3차) 1부. 끝.

	도시철도토목부장
수신자	건설총괄부장,서 울 특 별 시 장(재무과장)
주무관	조태현		궤도과장	윤방식		도시철도토목부장	01/20 이은상
협조자	경리과장	최영미		기획예산과장	최갑영
시행	도시철도토목부-723	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층	/
전화	02)772-7245	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	대시민공개