투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 실정보고에 대한 승인 통보(영등포구 여의동로 213 여의도 리첸시아 아파트 주변)

1. 영호이앤씨 영원 15-12-15(2015.12.23.)호와 관련입니다.

2.『교통안전시설물 원인자부담공사(영등포구 여의동로 213 여의도 리첸시아 아파트 주변)』와 관련하여, 실정보고에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항 승인

1) 실정보고 대상지 작업내용

연번	대 상 지	작 업 내 용	비고(T-GIS명)
1	영등포구 여의동로 213 여의도 리첸시아 아파트 주변	교통신호기(차) 및 경보등 신설	여의도성모병원후문(88골프장)(연동)

2) 승인내용

가) 지중화 포설이 원칙이나 굴착심의기간이 경과되어 신호선을 가공으                         로 설치 추진

나) 지장물(지하주차장 스라브)에 의하여 당초위치에 차량지주 기초 설치가 불가                          하기에, 기존위치에서 맞은편으로 위치조정하여 차량지주 설치 추진.

다) 토목공정 지연으로 인한 공사기간 연장

- 당초 : 2015.11.18. ~ 2015.12.31.

- 변경 : 2015.11.18. ~ 2016.01.31.

붙임 : 책임감리 현장 실정보고 및 공기연장 제출 건  1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	여의도금호리첸시아아파트입주자대표회의 대표자 이희구,(주)영호이앤씨 대표자 서태교,(주)한국전자통신엔지니어링 대표자 권용환
★주무관	홍승찬		기전과장	01/05 박재경
협조자	주무관	박태진
시행	기전과-93	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	부분공개(7)