투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰

1. 공원여가과-4527(2015.12.9.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 「2015 길동생태공원 시설정비사업 건축공사」에 사용되는 관급자재를 아래와 같이 납품기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 관급자재(목재판재) 조달구매

나. 계약금액 : 금919,000원

다. 계약업체 : 에스와이우드(주)  대표 문성렬

라. 계약물품 : 목재판재(1800×10×30㎜,말라스), 15㎡

마. 납품기한 변경

- 당초 : 2016. 01. 07

- 변경 : 2016. 06. 30

바. 연기사유 : 2015년 사고이월 대상 사업으로 본 공사 착공이 금년 1월 4일로 공사 일정에 맞춰 납품기한 연기

사. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 검토보고 1부.  끝.

	공원여가과장
주무관	조영곤		주무관	代조영곤		공원여가과장	01/06 윤세형
협조자
시행	공원여가과-41	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	2181-1183	/전송	2181-1185	/	chora0@seoul.go.kr	/	대시민공개