문서번호	시설개선과-124
결재일자	2016.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김기탁		신동호	01/06 이구석
협 조
	주무관			박관현

잠실야구장 노후 전기설비 보수사업 추진계획

2016. 1.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 노후 전기설비 보수사업 추진계획

잠실야구장의 노후된 변압기 등 전기설비를 교체하여 누전 및 정전 등 안전사고를 예방하고 야구경기를 안정적으로 진행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 잠실야구장 2016년 시설개선 투자 요청(잠관본 제2015-8호, 2015.06.24.)

- (기전항목) 노후 변압기 및 분전반 교체 요청

Ⅱ		전기설비 현황

변전실(개소)	변압기(대)	배전반(면)	MCC반(면)	분전반(면)
5	13	37	8	81

Ⅲ		사업개요

❍ 건    명 : 잠실야구장 D타워 외 1개소 배전반 제작구매설치

❍ 사업내용

- 배전반 교체 8면, 변압기 교체 3대

- MCC반 및 분전반 28면 교체

❍ 예 산 액 : 200백만원

❍ 발주방법 : 조달청 계약의뢰

❍ 예산과목

- 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충(체육진흥기금),

야구장 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		추진일정

❍ 2016. 1월 : 설계 및 발주

❍ 2016. 2월 : 계약

❍ 2016. 3월 ~ 6월 : 제작 및 설치

※ 배전반과 변압기는 4월 프로야구 개막 전까지 교체. 끝.