문서번호	인재기획과-226
결재일자	2016.1.6.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
남성준		박계완	01/06 원권식
협조

다솜관 숙소 리모델링 공사 설계용역 시행계획

2016. 1.

인 재 기 획 과

【 시설재무팀 】

다솜관 숙소 리모델링 공사 설계용역 시행계획

다솜관은 ‘79년 준공된 노후 합숙시설로 ’11년 합숙교육 폐지 및 내부환경(4인1실, 공동화장실 및 샤워실 등) 열악 등으로 내부구조 개선을  위한 전문성이 확보된 설계도서 작성이 필요하여 설계용역을 추진코자 함

Ⅰ		용역 개요

□ 필요성

❍ 다솜관은 ’11년 합숙교육 폐지 후 역량평가□공채면접시험, 유사시 격리시설 운영, 시민대관 등 다목적 활용을 위하여 통합디자인 관점에서 시설개선이 이루어져야하고,

❍ 36년이 경과한 노후시설(4인1실, 공동화장실 및 샤워실 등)임을 감안  합리적인 동선과 효율적 공간배치 및 건물에 대한 안전성□기술성□전문성  □경제성 확보 등을 위한 정밀한 설계도서 작성 필요

※ ‘15.2.24. 인재원시설에 대한 외부전문가(2인-디자인분야, 건축설계분야) 컨설팅 결과, 전문성이 확보된 정밀설계 후 공사 시행함이 타당하다는 의견임

□ 용역명 : 다솜관(생활관) 숙소 리모델링 공사 설계용역

□ 위  치 : 서초구 남부순환로 340길 58, 다솜관

□ 용역의 범위

❍ 숙소 리모델링 면적 약 1,500㎡( 숙소 총 33실 설치)

- 4인1실⇒2인1실(실별 화장실 및 샤워실 설치)

- 실별 오배수□급수배관 설비, 전기통신설비, 건축인테리어 등

Ⅱ		용역 방법

□ 용역기간 : 2016. 1. 12. ~ 2016. 1. 31.(예정)

□ 계약방법 : 수의계약

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항제5호

❍ 사 유

- 동종의 기술용역 경험이 있는 업체와의 조속한 추진을 위해『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제25조 제1항 제5호(2,000만원 미만 소액 용역)에 의한 수의계약 대상사업인 동 사업을『건축사법』에 의거 건축사면허를 소지하고, 건축사무소를 서울에 개설등록한 업체와 수의계약 추진

Ⅲ		주요 과업내용

❍ 실시설계에 필요한 자료의 수집, 정리

❍ 실시설계도면(CAD화 포함) 작성

❍ 설계내역서 작성

❍ 시방서 및 예정공정표 작성

❍ 공사 수량계산(물량산출) 및 견적 등

❍ 기타 발추처 요구사항

Ⅳ		행정 사항

□ 소요예산

❍ 설 계 비 : 19,522천원

❍ 예산과목 : 인재원청사 보수ㆍ보강, 시설비(401-1)

□ 추진일정(예정)

❍ 설계용역 타당성 심사요청	: 2016. 1. 7.

❍ 설계용역 시행	: 2016. 1. 12.

❍ 공사발주	: 2016. 2. 1.

❍ 공사착공 및 시행	: 2016. 2. 20. ~ 4. 24.

❍ 공사완료 및 준공	: 2016. 4. 25. ~ 4. 30.