문서번호	기전과-610
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
강운규	01/21 정윤식

『2013년 교통안전시설(안전표지)유지보수공사(연간단가)』

설계변경보고(제3회)

2014. 1

북부도로사업소

기전과

『2013년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』

설계변경보고(제3회)

우리사업소에서 시행중인 『2013년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』에 대해 감리사로부터 설계변경(제3차)보고 접수되어 이를 검토하고 보고함.

□ 관련근거

○ 2014. 01. 20. 2013년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

-3차설계변경 제출건

- 문서번호 영호 본 2013-283호(2014.01.20) 주식회사영호이앤씨

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사

○ 공사업체 : 태건엔에스피(주) 대표 김병준

○ 공사기간 : 2013. 3. 20 ~ 2014. 2. 28

○ 공사금액 : 금90,000,000원

□ 설계변경 내용

○설계변경 사유

- 연간단가 공사의 특성상 추정물량을 산정하여 공사를 추진함에 따라 계약물량 대비 시공물량 증감 발생

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변 경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	90,000,000	90,000,000	0
공 급 가 액	81,818,182	81,818,182	0
부가가치세	8,181,818	8,181,818	0

○주요물량 변경내용

(단위:매)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
1. 교통표지판 신설	268	268		-
2. 교통표지판 교체	123	146	23	(증)
3. 교통표지판 철거	331	302	29	(감)
4. 교통표지판 철주	58	50	8	(감)
5. 교통표지판 부착대	244	277	33	(증)
6. 도장 및 방향위치조정	4	-	4	(감)
계	1,028	1,043	97	(증)

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변 경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	90,000,000	90,000,000	0
공 급 가 액	81,818,182	81,818,182	0
부가가치세	8,181,818	8,181,818	0

□ 검토의견 및 조치계획

○감리사로부터 접수된 설계변경(제3차)에 대해 검토한 결과 적합하여 보고된 바와 같이 승인 처리코자 함.

붙임 : 1. 감리사 설계변경 요청 공문 1부.

2. 변경내역서 1부. 끝.