문서번호	건축부-174
결재일자	2016.1.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김민규		박범규	01/07 안재혁
협 조
	주무관			배수웅
	주무관			이호완
	주무관			김달용
	주무관			노장훈

IT Complex 건립공사

예비준공검사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

도시기반시설본부

(건 축 부)

IT-COMPLEX 건립공사

예비 준공검사 시행계획

우리 본부에서 추진중인 『IT-COMPLEX 건립공사』 관련 준공전 내·외부 시설공사 마감상태 등을 사전점검하여 준공일정 및 인계·인수 준비에 만전을 기하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : IT-COMPLEX 건립공사

○ 건축규모 : 지하7층, 지상21층, 연면적 81,969㎡

○ 공사기간 : 2009. 04.03 ~ 2016. 02. 29

(8차 : 2015.03.27 ~ 2016.02.29)

○ 계약금액 : 197,458,803,044원 (8차 - 41,724,000,000원)

○ 시 공 자 : 대림산업(주) 외 2개사

○ 감 리 자 : (주)건축사사무소 건원엔지니어링 외 2개사

○ 현 공 정 : 내·외부 마감공사(공정률 : 98%)

관련근거

○ 건설공사 예비준공검사 전면 실시(행정 2부시장 방침 제316호, 2012. 9.25)

- 예비준공검사 시행기관 : 발주부서 주관으로 유지관리부서와 합동점검 실시

○ 예비준공검사 실시요청 보고 (책임감리단 상암ITC감 2016 -03호, 2016. 1. 6)

예비준공검사 실시계획

○ 일   시 : 2016. 1. 12(화)   14:00

○ 장   소 : IT Complex 건립공사 현장

○ 점 검 자

- 책임감리단 (분야별 상주 및 비상주 감리원)

- 도시기반시설본부 (분야별 합동점검, 총 괄 : 건축총괄과장)

구 분	건 축 부	설 비 부	방재시설부	비 고
점검분야	건축, 토목	기계, 전기, 통신, 소방	조 경
점 검 자	김민규, 이석우	배수웅, 이호완	김달용

○ 입 회 자 (사업의뢰 및 입주 · 유지관리기관)

· 정보기획담당관(사업의뢰부서)

· 공간정보담당관, 정보통신보안담당관, 데이터센터, 문화융합경제과, 디지털산업과,

교통방송, 서울산업진흥원(SBA) 등

○ 주요 점검내용

- 공사 내용중 미비한 사항의 사전 보완

- 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

Ⅳ		향후 계획

○ 2016. 1. : 지적사항에 대한 보완조치 완료

○ 2016. 2. : 공사준공

○ 2016. 3. : 책임감리원 준공검수 및 시설물 인계·인수 추진

붙 임 : 1. 예비 준공검사 실시 보고(책임감리단) 1부.

2. 예비 준공검사 주요점검 양식 각1부.  끝.