투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울시 종로구 종로1길 36(수송동) 대림산업(주) 대표이사 김동수
(경유)
제 목	전체공사 계약기간 연장 재요청에 대한 회신

1. 대림 제15-35호(2015.12.28)『전체공사 계약기간 연장 재요청』과 관련입니다.

2. 귀 사와 우리 본부간에 설계․시공일괄입찰방식(T/K)으로 장기계속계약체결(2009.11.9)하여 시행중인「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」과 관련하여 전체공사 준공일(2016.02.28) 도래에 따른 전체공사 계약기간 연장과 계약금액조정 재요청(계약기간 연장에 따른 추가 소요비용에 대해서는 전체공사 준공일 최종 확정 시 정확한 실비를 산정하여 청구)에 대한 우리 본부의 의견을 아래와 같이 재회신 합니다.

가. 장기계속계약이란 사업이행에 수년을 요하는 사업으로 총예산이 미 확보된 상태에서 총 공사금액으로 입찰(총공사금액 및 공사기간 부기)하고 매년 확보된 예산범위 안에서 차수별 계약을 체결하여 차수공사를 이행하는 계약방식으로,

나. 각 차수계약 시 계약상대자의 허가ㆍ인가ㆍ면허 등의 자격요건 유지여부를 검토한후 계약이 체결되며 이에 따른 차수별 계약은 각 계약마다 독립된 공사기간을 지정하여 계약된 별건의 계약으로 따라서 본 공사의 최종 준공기간은 각 차수별 공사기간이 합쳐져 비로소 확정되는 것입니다.

다. 장기계속계약이면서 각 차수별로 독립되어 시행되는 동 사업에 대하여 그간 차수공사의 공기연장이 없었으며, 따라서 전체공사 계약기간 연장에 따른 추가소요비용(간접비)이 발생하지 않았음을 재회신 하오며, 향후에도 전체 계약기간에 대하여 장기계속계약의 취지에 부합되게 귀사에서 제시한 총공사기간(35개월 연장)을 미리 정하지 않고 장래 시행될 차수공사와 연동하여 계약체결하고 있음을 회신하오며,

라. 향후 각 차수별 공사시행중 추가소요비용(간접비)이 발생될 경우 차수별 준공대가 수령전 청구하시고, 귀사에서 제출하신 현장조직 운용계획(이하 “운용계획”라 함)은 추가소요비용(간접비) 발생에 따른 “운용계획”이 아닌 장기계속계약의 당해연도내 정상적인 예산집행에 따른 “운용계획”으로 판단됨으로, 당해연도 예산부족(예산 조기집행)으로 인하여 연말까지 공사의 일시정지가 발생될 경우에 대한 간접비가 최소화될 수 있는 운용계획을 제출하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김상용		환경시설과장	윤방식		방재시설부장	01/07 임춘근
협조자
시행	방재시설부-257	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	kimsy2405@seoul.go.kr	/	대시민공개