문서번호	물재생과-72
결재일자	2016.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		물재생과장	난지물재생센터소장
김재봉		김일운	01/07 최홍식
협 조
	주무관			김현곤
	주무관			김민호
	주무관			홍승지

『2016년 공통분야 유지보수 시설비』시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

난지물재생센터

(물재생과)

『2016년 공통분야 유지보수 시설비』시행계획

난지수계 차집관로의 원활한 하수소통 및 센터내 노후 시설물을 적기에 정비하고 지속적이고 체계적인 유지관리를 통한 환경보호 및 안전 저해 요인을 사전에 해소코자 함.

Ⅰ				예산확보 현황

구분	사업 현황	예산액(천원)	비 고 (담당자)
계		6.290,000
차집관로	홍제천 및 지천관로 보수공사	2.980,000	단일공사 (김재봉)
차집관로	난지수계 차집관로 준설공사	480,000	연간단가 (김재봉)
차집관로	하수 차집시설물 유지보수공사	480,000	연간단가 (홍승지)
차집관로	차집관로 준설토 처리용역	60,000	용역 (홍승지)
센터시설물	센터시설물 유지보수공사	480,000	연간단가 (김민호)
센터시설물	건축시설물 유지보수공사	480,000	연간단가 (김현곤)
센터시설물	제1처리장 최초침전지 보수공사	1,000,000	단일공사 (김민호)
센터시설물	농축조 보수공사	300,000	단일공사 (홍승지)
센터시설물	건설폐기물처리용역	30,000	연간단가 (김민호)

Ⅱ				추진방향

사업 조기집행을 위하여 2016년 2월중 모든 사업 발주

사업 추진일정 및 관리 철저로 예산 낭비 방지

공사장 안전관리 및 공정관리 강화로 부실공사 방지

Ⅲ				세부 추진계획

홍제천 및 지천관로 보수공사

○ 소요예산 : 2,980,000천원

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한 『상하수도설비공사업』등록업체로서 주된 영업소의 소재지를 서울시에 둔 업체

- 2016년 2월중 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 적정성

심의 의결된 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용

※ 특허공법 적용 사유 : 홍제천 상명여대 하류 400m 지점에서 유진상가

주변의 차집관로 매설지역은 생태하천으로 조성되어 있어 많은 시민이

찾는 휴식공간으로 87년 매설되어 관 노후 및 세굴이 상당부분 진행

되어 오수 누수로 인한 환경오염과 민원이 발생되는 지역으로 현장여건에

맞는 유리한 공법 선정 필요

○ 과업세부내용

- 홍제천 및 지천관로 보수 : 1.920m(D=1,500mm)

난지수계 차집관로 준설공사

○ 소요예산 : 480,000천원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한 『상하수도설비공사업』 등록업체

로서 서울시에 주된 사무소가 있는 업체

- 2016년 2월중 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 적정성

심의 의결된 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용

※ 특허공법 적용 사유 : 우리센터의 차집관로는 암거형태로 맨홀을 통

하여만 준설이 가능한 구조로 유수의 흐름을 차단하지 않고 준설이 가

능한 특허공법 선정 필요

○ 과업세부내용

- 차집관로 준설 : 한강 외 10지천 2,300㎥

- 맨홀정비 및 뚜껑교체 : 10개소

난지수계 하수차집시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 소요예산 : 480,000천원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『토목공사업』        또는 『토목·건축공사업』등록업체로서 서울시에 주된 사무소가 있는 업체

○ 과업세부내용

- 물돌리기 장치 설치 : 3개소

- 협잡물 야적장 설치 : 2,000톤

차집관로 준설토 처리용역

○ 소요예산 : 60,000천원

○ 입찰방법 : 수의계약

○ 수의계약 대상업체 : 산양환경산업(주)

○ 수의계약 사유

- 차집관로 준설토 처리방법 개선으로 자원재활용과 예산절감 추진지시     - 준설토 무상반입 가능한 유일한 업체와 서울시와 준설토 운반에 대해        이행확약서 제출

- 준설토 운반처리비가 실비이하 수준이며 무상으로 반입이 가능한 업체

○ 과업세부내용

- 준설토 운반 처리 : 2,300㎥

센터시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 소요예산 : 480,000천원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『토목공사업』         또는 『토목·건축공사업』등록업체로서 서울시 또는 경기도에 주된 사무소가         있는 업체

○ 과업세부내용

- 센터내 도로정비 : A=3.5a

- 시설물 안전점검 지적사항 조치 등

건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 소요예산 : 480,000천원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한『시설물 유지관리업』등록업체로서 서울시 또는 경기도에 주된 사무소가 있는 업체

○ 과업세부내용

- 주차장설치(정문 15면, 축구장 20면)

- 건축시설물 창호, 방수, 도장 등 보수

제1처리장 최초침전지 보수공사

○ 소요예산 : 1,000,000천원

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한 『시설물 유지관리업』 등록업체

- 2016년 2월중 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 적정성

심의 의결된 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용

※ 특허공법 적용 사유 : 최초침전지는 하수가스 발생 및 수위 변동 등으로 인한 콘크리트 손상요인이 있어 이에 적합한 특허공법 선정 필요

○ 과업세부내용

- 제1처리장 최초침전지 4개지(1-2, 1-4, 1-5, 1-7지)

- 단면보수 4,430㎡, 비계설치 및 기타

농축조 보수공사

○ 소요예산 : 300,000천원

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한『시설물 유지관리업』등록업체로서 서울시 또는 경기도에 주된 사무소가 있는 업체

- 2016년 2월중 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 적정성

심의 의결된 결과에 의거 기술(특허) 시용협약 체결된 공법 적용

※ 특허공법 적용 사유 : 농축조는 하수처리 공정상 발생하는 가스 및 농축된 슬러지 처리 등으로 인한 콘크리트 손상요인이 있어 이에 적합한 특허공법 선정 필요

○ 과업세부내용

- 제1처리장 농축조 1개지(3-2지), 제2처리 농축조 2개지(슬러지 잉여농축조 A, B)

- 단면보수 300㎡, 비계설치 및 기타

건설폐기물 처리용역(연간단가)

○ 소요예산 : 30,000천원

○ 입찰방법 : 전자공개수의계약(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설페기물의 재활용 촉진에 관한법률 제21조에 의한『페기물 수집, 운반업(건설폐기물)과 폐기물 중간처리업 허가를 득한 업체』, 폐기물 수집·운반만 가능한 업체는 폐기물 중간처리 업체와 공동도급이 가능한 업체로서 서울시 또는 경기도에 소재한 업체

○ 과업세부내용

- 폐기물 운반 480㎥

- 폐기물 처리 1,100톤

Ⅳ				향 후 계 획

2015. 1. : 현장조사 및 물량 산정

2014. 2. : 설계 및 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 선정

2014. 3. : 계약 및 공사착공. 끝.