문서번호	도로보수과-136
결재일자	2016.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
탁영우		김환겸	01/07 代김현수
협조
	주무관		송광석

지하철9호선2단계 915공구

포장도로 인계인수에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

동부도로사업소

(도로보수과)

지하철9호선2단계 915공구

포장도로 인계인수에 따른 검토보고

『지하철9호선2단계(915공구)』 포장도로에 대한 인계인수를 실시하여 도로유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	공사개요

▢ 공 사 명 : 지하철 9호선2단계 915공구 건설공사

▢ 위    치 : 강남구 논현동 차병원사거리~삼성동 힐스테이트아파트

▢ 사업기간 : 2008. 06. ~ 2014. 12.

▢ 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부(도시철도토목부)

▢ 감 리 사 : ㈜동일기술공사

▢ 도 급 자 : 경남기업(주) 외 1개사

▢ 공 사 비 : 101,072백만원

Ⅱ	추진경위

▢ 2015. 03. 17. : 차도 원상복구 계획 요청(동부→도기본)

▢ 2015. 04. 29. : 차도 원상복구 계획 자료제출(도기본→동부)

▢ 2015. 10. 20. : 915공구 공사구간 합동점검 실시

□ 지적사항 : 봉은사로 210 측구주변 침하, 언주역2~3번출구 도로침하

선정릉역 주변 포장 시공이음부 보완, 노면표시 미시행 등

▢ 2015. 10. 21. : 합동점검 및 인계인수 관련 보완사항 통보(동부→도기본)

▢ 2015. 12. 31. : 합동점검 지적사항 조치결과 제출(도기본→동부)

□ 지적사항 조치완료 및 보완사항 제출

Ⅲ	인수인계 내역

▢ 아스팔트포장도로 : 표층(#67) 151a,  중층(#467) 84a

▢ 차선도색 : 1,701㎡

Ⅳ	검토의견

▢ 상기와 같이 공사 완료된 915공구 포장도로에 대하여 합동점검결과 지적사항을 보수완료하였기 포장도로의 원활한 유지관리를 위해 상기 포장도로를 인수코자 함.

붙임 : 1. 포장도로 도면 1부.

2. 책임감리 기술검토의견서 1부.

3. 합동점검 조치결과 1부.

4. 인수인계서 1부.  끝