문서번호	시설보수과-137
결재일자	2016.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	01/07 신현태
협조

「2016년 상반기」

도로시설물 정기점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

2016년 상반기 도로시설물 정기점검 시행계획

우리사업소 소관 도로시설물에 대한 2016년도 상반기 정기점검 시행계획을 수립 및 시행함으로써 해당 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ.  정기점검 개요

■ 관련근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조

(안전점검의 실시 : 정기점검 - 반기에 1회 이상 실시)

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일반교량	고 가	I.C	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	59	17	8	7	5	18	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	7	5	2	1	8
법정외	29	10	3	5	-	8	3

◎ 개봉지하차도는 도기본에서 인계인수 후 정기점검

◎ 여의하류2교, 여의하류지하차도, 여의2지하차도, 노들길지하차도-노들길 자동차 전용도로 해제와 관련 시설물 인계인수 후 정기   점검

■ 점검기간

◎ 상반기 정기점검 : 2016. 1. 1. ~ 6. 30.

Ⅱ. 세부 점검계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 유태용, 토목운영7급 조정갑
2 조	시설6급 윤동원, 토목운영7급 조정갑
3 조	시설7급 김규춘, 토목7급 김승진

※ 주 점검자(점검 책임자) : 시설물 담당자

■ 총 점검일수 : 59일 (59개 시설물 점검)

◎ 1조(12개소, 12일),  2조(25개소, 25일),  3조(22개소, 22일)

※ 설날대비(1~2월), 해빙기대비(3월), 우기대비(5월) 점검기간은 맞춤형 점검․순찰 시행

■ 점검계획 수립

◎ 점검 차량 사용과 시설물에 대한 도보․육안점검

-편성조별 화 · 목요일 점검

-부득이한 사유발생시 익일 점검

※ 정밀안전진단, 정밀점검 실시기간과 중복시에는 정기점검을 생략할 수 있음

(국토해양부고시 제2009-785호, 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 3.3.1 정기점검)

■ 점검계획 수립

◎ 점검 차량 사용과 시설물에 대한 도보․육안점검

-편성조별 화 · 목요일 점검

-부득이한 사유발생시 익일 점검

■ 담당자별 시설물 현황

직 명	성 명	담 당 시 설 물	비고
시설6급 (토 목)	유태용 (12)	- 목동교(2종․B), 안양교(2종․C), 선유교(법외․A) - 개봉철도고가(2종․B), 화곡고가(법외․B) - 신월IC(법외․B), 오류IC(법외․B), 시흥IC(법외․B) - 작동터널(1종․B) - 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B), 목동교서측지하차도(법외․B)
시설6급 (토 목)	윤동원 (12)	- 서울교(2종․B), 고척교(2종․B), 광명교(법외․B), 개봉교(법외․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B), 개화교(법외․A) - 개봉고가(2종․B) - 궁동터널(1종․B), 생태터널(1종․B) - 오목교서측지하차도(법외․B) - 개화천복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	김규춘 (13)	- 오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 여의2교(2종․C), 광복교(법외․B), (구로)도림교(법외․B) - 가리봉철도고가(2종․C) - 개화IC(법외․B), 공단IC(2종,B) - 구로역지하차도(법외․B), 신도림지하차도(2종․B), 오목교동측지하보차도(법외․B) - 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	김승진 (12)	- 구로1교(법외․B) - 구로고가(2종․B), 가마산고가(법외․B), 오류철도고가(법외․B) - 영등포R. IC(2종․B) - 화곡터널(2종․ B) - 가마산지하차도(2종․B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B), 서부트럭터미널앞 지하차도(1종․A) - 외발산지하차도(1종․B), 고척2지하차도(법외․B)
토목운영주사보	조정갑 (10)	- 역곡천교(법외, B), 신정교접속교(법외, B) - 범박터널(1종, B) - 오목지하차도(2종․B), 오금지하차도(2종․B), 서울교접속지하차도(법외․B), 성산지하차도(법외․B), 구로지하차도(2종․B), - 염창IC하부복개(법외․B), 행주IC교(법외․B)

■ 점검방법 및 기록

◎ 현장점검

- 점검일은 2인 1조로 현장점검 후 점검결과 보고서 작성

- 현장점검 시 통일된 복장, 카메라 및 통신기기 휴대

- 안전점검중 안전사고 발생되지 않도록 사전준비 철저

◎ 기존 손상 부분 조사

- 시설물 담당자(점검책임자)는 점검구간에 대해 이전에 시행한   안점점검․진단의 지적사항과 보수․보강 등 조치내용을 파악

- 손상의 진행 또는 보수 이후 새로운 손상 발생여부 확인 등

보고서에 위치, 상태 등을 기록하여 지속적인 추적관리 시행

◎ 신규 손상 부분 조사

- 새로 발견된 손상부분은 점검 보고서에 위치, 상태 등을

기록하고 손상의 진행여부를 지속적으로 추적관리

◎ 사진관리

-시설물의 상태(손상, 보수․보강 등)를 사진 촬영하여 보고서에 첨부

Ⅲ. 간부직 현장점검계획

■ 소장 : 월 1회,  과장 : 월 2회 합동점검

월	일	시설물명	점 검 자			비 고
			소 장	과 장	담당자
1	12	구로고가		○	김승진	육안점검
	21	개봉철도고가	○	○	유태용	육안점검
2	-	설날대비 순찰점검 별도 시행
	23	가리봉철도고가	○	○	김규춘	육안점검
3	-	해빙기대비 안전점검 별도 시행
4	5	오금지하차도		○	조정갑	육안점검
	19	서부트럭터미널앞지하	○	○	김승진	육안점검
5	-	우기대비 순찰점검 별도 시행
	31	선유교		○	유태용	육안점검
6	9	도림천복개(좌안)		○	김규춘	육안점검
	16	개봉고가	○	○	윤동원	육안점검

Ⅳ. 행정사항

■ 점검 결과 보고

◎ 점검결과 당일 또는 익일까지 보고서 작성 원칙

◎ 교통통제를 요하거나 긴급 점검․진단 및 보수․보강을 요하는 경우에는 사전 조치 등 필요조치 철저

■ 지적사항 조치

◎ 경미한 사항은 사업소 직영반 및 일상유지보수업체 활용 보수

◎ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항은 즉시 보고 후 전문가(시설안전자문단, 용역책임기술자 등) 의견 포함 조치계획(보수방법, 보수시기, 예산확보 등) 수립 및 시행

붙임 : 정기점검 일정표(일자별, 구간별).  끝.