문서번호	평생교육과-539
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	평생교육기획팀장	평생교육과장
송계수	함대진	01/21 김정호

은평학습장 인테리어 공사

계약기간 연장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

평생교육과

은평학습장 인테리어 공사

계약기간연장보고

은평학습장 인테리어 공사에서 현장상황에 부합한 설계변경 및 작업내용 추가에 따라 계약기간을 연장하고자 함

Ⅰ		계 약 현 황

□ 사업개요

○ 사업내용 : 은평학습장 인테리어 공사

○ 계약기간 : 2013.12.30 ~ 2014. 1.24

○ 계약금액 : 금일억이천오백칠만삼천오백오십원(금125,073,550원)

○ 업 체 명 : ㈜다옴디앤아이

□ 추진경과

○ 계약체결	: ‘13. 12.27

○ 공사현장 확인 및 관계자 회의	: ‘14. 1.10

Ⅱ		계약기간 연장 내용

□ 계약기간 연장 사유

○ 기존 계약에 따른 과업사항은 정상적으로 추진하고 있으나, 상기과업과 별도로 인테리어 공사 관련 관계자 회의 및 현장 확인을 통해  현장상황에 맞는 설계도서 변경 및 적용에 따른 인테리어 공사 일정이 추가소요됨에 따라 사업기간 (17일)을 연장 하고자 함

- 현장 상황에 부합되는 마감재의 설계변경 및 당초 설계도서상 누락되어 있는 항목의 설계반영 검토 : 창호 브라인드 / 경계벽체 (유리후레임 및 유리) / 창호커텐박스 / 마감재 변경

□ 기간연장 내용

○ 계약기간 연장 : 17일

- 당초 : 2013. 12. 30 ~ 2014. 1. 24

- 변경 : 2013. 12. 30 ~ 2014. 2. 10

○ 귀책사유 : 서울시

○ 지체상금 부과 여부 : 부과하지 않음

Ⅲ		향 후 일 정

□ 계약기간 연장에 따른 재계약 (재무과) : ’14. 1월말

□ 인테리어 공사 추진 : ~’14. 2.10