투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(하도급사 관련 동향보고에 따른 업무지시)

1.업무지시현장 :  동부간선도로 확장공사(3공구) 세원건설(주), 동부간선도로 확장공사(3공구) 동부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2016-01-08 13:01:01

3.지 시 내 용: 동삼감제2015-201(2015.12.31.)호와 관련입니다.

가. 위호와 관련하여 장암지하차도 구조물 공사 중인 도급사(세원건설)와 하도급사(네비엔)간의 분쟁으로 공사중단 사태 동향보고에 대하여 세원건설은 조속한 시일내에 하도급사와 원만히 해결하는 등 특단의 노력을 강구하여 주시고 공사중단으로 인하여 전체 공기 지연 및 금년 10월 의정부 구간 개통에 따른 교통전환이 이루어지지 않을 경우 관련규정에 의거 강력히 조치 할 예정이니 즉시 공사를 재계토록하여 주시기 바라며,

나. 책임건설사업관리기술자는 당사자간 원만히 분쟁이 해결 될 수 있도록 노력하여 주시기 바라며 도급사에게 공기지연으로 인한 10월 의정부 구간 개통에 차질이 발생되지 않도록 경고 및 독려와 개통관련 장암지하차도 공정표를 작성 제출하여 주시기바랍니다.

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							김동현			교량건설과장					이동훈					토목부장					01/08 김영수
협조자
시행			토목부-562									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 14															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2576						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개