문서번호	토목부-1174
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
최진우		김영수	01/21 노우성
협조
	주무관		김성권

설계변경 검토 보고 (전체6회, 5차1회)

《 월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역 》

2014. 1.

도시기반시설본부

토   목   부

설계변경 검토 보고 (전체6회, 5차1회)

《 월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역 》

용역개요

○ 용 역 명 : 월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역

○ 용역기간 : ’10. 1. 5 ~ ’15. 8. 4

○ 도 급 비 : 7,615백만원

○ 감 리 사 : 포스코엔지니어링, 동일기술공사

보고내용

○ 관련근거 : 본부장 방침 토목부-19588호(‘13.10.23.), 토목부-768호(‘14.1.14)

월드컵감리 2014-13(‘14.1.20)호

○ ‘13년 7월에 발생한 노량진 배수지, 방화대교 접속도로 안전사고와 관련 터널, 강교등 『 공사특성에 적합한 전담감리원 증원배치 』 방침에 의거 ’13.11.25 안전감리원 추가 투입에 따라 ’14년 배정된 예산(67백만원)에 대하여 설계변경이 필요함

- 전체 : ‘15.8.4 준공시까지는 토목감리원 배치기간을 조정하여 안전감리원(20개월) 투입

- 5차 : 용역비 증액없이 토목감리원 배치기간을 조정하여 안전감리원(1.9개월) 투입

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
전 체	책임 감리원	67.0개월	67.0개월	-
	토목 감리원	419.0개월	410.07개월	감 8.93개월
	강교,조경등 감리원	114.4개월	114.4개월	-
	안전 감리원	-	20.23개월	증 20.23개월
	계	533.4개월	544.7개월	증 11.3개월
5 차 1 회	책임 감리원	12.3개월	12.0개월	감 0.3개월
	토목 감리원	36.8개월	36.0개월	감 0.8개월
	안전 감리원	-	1.9개월	증 1.9개월
	계	49.1개월	49.9개월	-

조치계획

○ 공사장 안전사고 예방 및 효율적인 감리업무를 추진하기 위하여 아래와 같이 설계변경 시행하여 용역 추진에 만전을 기하고자함

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
전 체	7,615,830	7,682,830	67,000
5차 1회	800,000	800,000	-

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 감리단 공문 및 설계변경내역서 1부.  끝.