문서번호	공원운영과-273
결재일자	2016.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
권지현	송복식	서동선	01/08 이춘희
협 조

「보라매공원 반려견놀이터 조성공사」공사기간 변경 검토 보고

2016. 1

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

「보라매공원 반려견놀이터 조성공사」

공사기간 변경 검토 보고

우리 사업소에서 추진중인 「보라매공원 반려견놀이터 조성공사」와 관련하여 사전절차 이행 등의 문제로 착공일 및 공사기간을 아래와 같이 변경하고자 함.

공사개요

❍ 공 사 명 : 보라매공원 반려견놀이터 조성공사

❍ 공사내용 : 휀스 및 안내소 설치, 마사토포장, 음수대 설치 등

❍ 공사기간 : 2016.1. 4. ~ 4. 2 (90일간)

❍ 도 급 자 : ㈜케이지에코 대표 윤인권

검토내용

❍ 변경사유

- 공원조성계획결정(변경)과 관련하여, 실시계획작성 및 공람공고(14일) 시행 이후 공사착공하는 것이 절차이므로, 공람공고( ‘1.14 ~ 27) 완료일을 감안하여 착공일을 변경

- 동절기 한파로 1월 중 공사 시행이 어려우므로 2월로 착공일 변경 및 준공기한 변경

❍ 착공일 및 공사기간 변경

- 당 초 : 2016. 1. 4. ~ 4. 2 (90간)

- 변 경 : 2016. 2. 5 ~  4. 30 (86일)

❍ 지제상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

처리의견

❍ 착공일 변경 및 준공기한 연기사유가 타당하므로 준공기한 연기요청하고자 함.   끝.