투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인 통보 (동남권유통단지 기반시설(탄천서측도로) 조성공사)

1.  도로보수과-4087호(2014.7.15) 및 SH공사 기반시설사업부-33호(2016.1.12)호와 관련입니다.

2.  서울특별시 도시기반시설본부에서 시행하고 있는『동남권유통단지 기반시설(탄천서측도로) 조성 교통안전시설(노면표시) 설치공사』 원인자부담공사와 관련하여 다음과 같이 승인하오니

3. 원인자는 승인시 기 배부한『원인자 준수사항』 및 『노면표시 공사설명서(시방서)』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
노면표시	도색 및 제거 19,791m	도색 및 제거 19,673m	추가규제 교통관리과 -34382호 (‘15.12.15)
공사기간	2014. 7. 15 ~ 2015. 4. 30	2014. 7. 15 ~ 2016. 4. 30
원 인 자	SH공사
설 계 사	도로교통공단
감 리 사	도로교통공단
시 공 사	화성이엔씨㈜

나. 변경사유

- 숯내교 구간 차로확장에 따른 차로 재귀획등 교통규제 반영.

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이민호		주무관	송광석		도로보수과장	01/13 김환겸
협조자
시행	도로보수과-307	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0342	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개