문서번호	교량안전과-666
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장
백운경	유제천	01/13 박문희

「한강교량 일상유지보수공사 책임감리 용역(3차)」 착수에 따른 업무지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

교량안전과

「한강교량일상유지보수공사 책임감리용역(3차)」

착수에 따른 업무지시 계힉 보고

2016년도『한강교량일상유지보수공사 책임감리용역(3차)』계약 및 착수계가 접수되어 책임감리원에 대해 공사 착공 전 사전검토 및 시설물 순찰 등 업무지시 계획 보고입니다.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 한강교량일상유지보수공사 책임감리용역

용역기간 : (전체) 2014. 4.10 ~ 2016.12.31

( 3차) 2016. 1.01 ~ 2016.12.31

용 역 비 : (전체) 1,171,040,000원

( 3차)   404,880,000원

용 역 사 : (주)대한컨설탄트(60%), (주)신명건설기술공사(40%)

감리단 구성 : 책임감리원 외 2인

○ 책임감리원 : (주)대한컨설탄트     이영세

○ 보조감리원 : (주)대한컨설탄트     박영철

(주)신명건설기술공사 권승만

Ⅱ		감리대상 사업 현황

한강교량일상유지보수공사 1, 2공구

○ 위  치 : 서울시 관리 한강교량 20개소(구리암사대교~행주대교)

○ 공사기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12. 31

○ 공사내용 : 교면포장, 신축이음장치 보수, 강재보수, 강재도장 등

○ 공 사 비 : 6,595백만원

- 1공구 3,297.5백만원,  2공구 3,297.5백만원

2016 감리대상 공사추진 현황

○ 추진사항

- 2015.12.14 : 계약심사 요청(1,2공구)

- 2015.12.31 : 계약심사결과 통보(1공구)/계약심사지연(8일)

- 2016. 1. 7 : 계약심사결과 재심사 요청(1,2공구)

※‘16년 1월기준 노임,자재단가 적용

○ 향후계획

- 2016. 1.13 : 계약심사 완료예정

- 2016. 1.14 : 공사발주(긴급공고)

- 2016. 2. 5 : 계약 및 착공예정

Ⅲ		업무지시 계획

감리대상공사 착공 전 감리업무 사전검토 및 교량 순찰 지시

○ 상기와 같이 계약심사 지연으로 감리대상공사가 미 계약되어, 착공 전  책임감리원에게 아래와 같이 사전검토 및 시설물 순찰 등 업무지시하여 시설물관리에 만전을 기하고자합니다.

► 2015년도 정밀점검 및 안전진단용역 실시 완료 시설물에 대하여 손상물량 확인 및 우선순위 등 보수방안 검토 수립

- 정밀안전진단(2개소) : 서강, 마포(하류교)

- 정밀점검(10개소) : 천호,잠실,마포(상류교),한강,광진,영동,성수,

동호,성산,행주(상류교)

► 교량 순찰실시하여 포트홀 및 시민불편사항 등. 적출사항에 대하여 조치계획 수립

붙임 : 순찰 결과 양식  1부. 끝.