문서번호	도시철도설비부-416
결재일자	2016.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	설비계획과장	도시철도설비부장	도시철도국장
박철호	이명수	정찬웅	01/13 이정화
협 조
	기획예산과장		안순봉
	경전철계획과장		박용우
	송변전과장		박동규
	시설전기과장		서태창
	설비공사과장		황영일
	정보통신과장		추경수
	신호과장		김영하

2016년도 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 계획

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년도 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 계획

2016년도 지하철 건설공사 설비분야 품질확보를 위한 품질관리 계획을 수립․시행하여 시공 품질 향상에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

○ 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조(감독)

2		추진목표

○ 외부 전문가 점검을 통한 품질 확인․점검 강화

○ 품질관리 교육 강화(공정회의, 외부전문가 점검중 교육 병행 등)

○ 부실공사 요인 사전예방(자율․전문가 점검, 담당자 교차점검, 공정회의 등)

3		‘15 추진실적

○  점검대상 : 우이-신설 경전철 건설공사(9호선3단계 시기 미도래로 미실시)

○  점검구분 : 자체점검 2회, 외부전문가 2회

○  추진 공정율 : 49%(2016년 1월 현재 우이-신설 설비분야공사)     (단위 : %)

분야별	시스템분야			전기분야	기계분야
	송변전/전차선	통신	신호
공정율 (계획/실적)	82/72	67/68	60/65	85/41	35/33

○  점검실적                                               (단위 : 건)

구 분	계	시스템 공구			1 공구		2 공구		3 공구		4 공구
		송변전 전차선	통신	신호	전기	기계	전기	기계	전기	기계	전기	기계
계	113	6	5	11	11	27	8	10	7	8	13	7
조치완료	92	1	5	10	11	25	8	2	7	5	13	5
조치 중	21	5		1		2		8		3		2

4		추진계획

□ 점검대상

○ 우이-신설경전철 건설공사 설비분야 : 1~4분기 점검

○ 9호선3단계 건설공사 설비분야 : 4분기 점검예정(공사 착수 이후)

□ 점검분야

○ 5개 분야(송변전/전차선, 정거장전기, 기계, 통신, 신호)

(차량 제외 : 도시철도법에 따라 한국철도기술연구원 주관 성능시험)

○ 점검내용 : 설계도서 및 건설현장의 관련 규정 준수여부 등

□ 점검종류

○ 정기점검

- 점검시기 : 연 4회(분기별 1회)

- 점 검 자 : 분야별 외부전문가(2,4분기), 해당 과장․담당(1,3분기)

- 점검방법

∙ 외부전문가 점검 : 5개 분야별 외부전문가 각 1~2인이 현장점검

		자격기준
▸ 서울시 건설기술심의위원회 조례 제2조 준용 (건설공사에 관한 풍부한 경험과 식견을 갖춘자) ▸ 국가기술자격법에 의한 당해 분야의 기술사 ▸ 해당 분야의 전문지식과 실무경험이 있다고 인정되는자

∙ 자체점검 : 공구 담당부서 점검 1회, 공구별 교차점검 1회

○ 수시점검

- 공정회의 전 현장점검

∙ 우수 사례, 부실시공 사례 전파를 통한 시공품질 향상 교육 연계

∙ 공구별 현장대리인, 감리원의 공정․품질 관리 설명을 통한 교육 병행

- 자율점검

∙ 분야별 해당 과장․담당자 수시 점검

∙ 공구별 담당자별 교차점검, 합동점검을 통한 부실사항 조치

□ 세부 추진사항

○ 지하철 운영 및 건설, 감리, 설계 전문가 초빙(담당부서 추천)

- 지하철 설비관련 각 분야별 전문업체 및 외부전문가 점검

- 시공 및 가동의 적정성 여부

- 공정관리 실태 및 품질향상을 위한 시공방법 개선 등

○ 정기적 공정회의를 통한 품질관리 교육 강화

- 품질관리상태 및 안전관리 계획 준수 여부

- 공정회의 전 합동점검시 우수 감리원 및 직원을 통한 현장교육 실시

○ 지적사항 공유를 통한 부실사례 예방

○ 자체 점검 강화

- 공구별 담당자 교차점검 또는 합동점검 실시

○ 지적사항 조치

- 분야별 담당자가 조치완료시까지 지속적 관리

5		행정사항

○ 외부전문가 점검 수당 지급

- 우이-신설경전철 : 2, 4분기 외부전문가 점검

∙ 참여비 : 1인×14일×200,000원×2회 = 5,600천원

분야별	시스템 분야			전기분야	기계분야
	송변전/전차선	정보통신	신호
점 검 일 수	1인×2일	1인×2일	1인×2일	2인×2일	2인×2일

※ 9호선3단계는 착공단계로서 자체점검을 하므로 수당 필요없음

- 지급방법 : 점검 완료 후 개인별 은행계좌에 입금조치

- 예산과목 : 신교통수단도입, 경전철건설사업, 우이신설지하경전철건설,시설비및부대비, 시설부대비

붙임 1. 품질관리 실태 점검표 1부.

2. 품질관리 실태 점검 보고서 1부. 끝.