투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 사항 알림【보강토옹벽공사】

1. ㈜수성엔지니어링 천호수 제2016-7호(2016. 1.14.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행 중인『천호대로(광나루역) 확장공사』의 하도급 계약 사항이 변경(공사기간)되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급계약 사항

구 분	구 분 (하도급공종)	원도급자	하도급사	하도급 기간	도급액(원)	하도급액(원)	하도급율	비고
당 초	보강토옹벽	해동건설(주)외 1개사 대표 선병진	㈜지성이씨에스 윤 남 식	‘13. 6.17 ~’15.12.31	341,000,000	288,200,000	84.5%
변 경				‘13. 6.17 ~’17.12.31	341,000,000	288,200,000	84.5%

붙임 : 건설공사의 하도급변경계약 통보서  1부 .(별도 송부).  끝.

	토목부장
주무관	이상근		교량건설과장	01/14 박용택
협조자
시행	토목부-936	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2579	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	대시민공개