문서번호	교통운영과-799
결재일자	2016.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	중앙차로팀장	교통운영과장		보행친화기획관
이상돈	이병운	강진동		01/15 서성만
협 조
	신호시설팀장		구봉서

‘16. 중앙버스전용차로

흐름개선사업 추진 계획

2016. 1.

도시교통본부

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘16. 중앙버스전용차로 흐름개선사업 추진 계획

우리시에서 운영하고 있는 중앙버스전용차로 구간 중 교통정체 및 혼잡지점, 시민 이용불편 지점 등을 개선하여 대중교통 이용 시민 편의를 도모하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : ’16 중앙버스전용차로 흐름개선사업

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12(12개월간)

□ 사업내용

❍ 중앙정류소 시민이용 불편 및 교통사고 다발 지점 개선

❍ 중앙버스전용차로 구간 중 교통정체 및 유턴 불편지점 개선 등

□ 소요예산 : 1,600백만원

❍ 시설비 : 1,500백만원, 감리비 : 3백만원, 사무관리비 : 97백만원

Ⅱ		2015년 추진 실적

□ ’15년 추진실적 : 총 8개소

❍ 교통사고 잦은 지점 개선사업(4개소)

- 시흥대로 구로디지털단지역 중앙차로 무단횡단금지시설 설치 : 공사완료

- 마포로 등 3개소 중앙버스전용차로 무단횡단금지시설 설치 : 공사완료

❍ 중앙버스전용차로 흐름개선사업(4개소)

- 구로세무서 앞 중앙정류소 이설 : ’15년 설계완료, ’16년 공사 예정

- 통일로 홍은사거리 시범 유턴 설치 : 공사완료

- 경인로 신도림역 앞 중앙정류소 횡단보도 연결통로 설치 : 공사완료

- 천호대로 한신휴츨러스 앞 중앙정류소 횡단보도 개선 : 공사완료

Ⅲ		세부사업계획

□ ’16년 중앙버스전용차로 흐름개선사업 시행

사업내용		사업비 (백만원)	시행 시기
❍ 시설비(1,500백만원)
	’16년 중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역	80	□ ’16.2~12
	중앙버스전용차로 구간 시민교통안전 강화 - 중앙차로 구간 대형교통사고 발생지점 시설 개선 - 중앙차로 구간 무단횡단금지시설 설치(1.3km)	300	□ ’16.2~6 설계 □ ’16.2~11 사업시행
	대중교통 이용 시민 불편지점 개선 - 유턴폐지 구간 우회표지판 정비 등 불편지점 개선	300
	중앙버스전용차로 흐름개선 및 운영체계 개선	620
	서울역버스환승센터 시설 개선	100	□ 상반기 시행
	융설시스템 시범 설치	100	□ 상반기 대상선정 및 시행
❍ 감리비(3백만원)
	중앙버스전용차로 흐름개선 사업 관련 감리비	3	흐름개선 공사와 병행
❍ 사무관리비
	정책브랜드(BI) 제작 용역	80	□ ’16.2~12
	명절 연휴기간 경부고속도로 운영시간 연장 홍보	10	□ 2월, 9월
	교통운영보조원 운영	7	□ 수시
합 계		1,600

□ 중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역 시행

❍ 용 역 명 : ’16.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역

❍ 용역기간 : 착공일 ~ 2016.12.31.

❍ 소요예산 : 80백만원

*********************************

❍ 과업내용

- 중앙버스전용차로 시민 불편지점 및 흐름개선지점 기본 및 실시설계

❍ 예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

Ⅳ		추진 일정

❍ ’16년도 사업비 이월을 방지하기 위하여 1월중 설계용역 발주 및 상반기 공사 추진, 재배정부서 조기 집행 독려

- 2016. 1 : 기술용역 타당성 심사 요청 및 발주

- 2016. 2 ~ 12 : 흐름개선 설계용역 시행

- 2016. 2 ~ 12 : 흐름개선사업 시행

Ⅴ		행정사항

❍ ’16.중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역 발주 및 시행

❍ 흐름개선사업 관련 교통안전시설 심의 요청(서울시지방경찰청)

❍ 실시설계 후 관할 도로사업소 및 자치구에 재배정, 공사시행

❍ 신호기공사의 감리용역은 교통운영과(신호시설팀)에서 총괄 통합 발주 및 시행

붙 임 : 1. 중앙버스전용차로 흐름개선사업 세부내역

2. 설계용역 과업대상 1부.  끝.