투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전체 예정공정표 변경 승인)

1.업무지시현장 :  신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 지에스건설 주식회사, 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 주식회사 신성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2016-01-14 17:01:40

3.지 시 내 용:

1) 신봉감 제16-93호(2016. 1.14.)와 관련입니다.

2) 2016년 예산 부족에 따른 전체 예정공정표 변경검토 보고(예산 배정 부족 등의 사유와 공정지연 만회대책)에 대하여 감리단 검토의견대로 전체 예정공정표 변경을 승인하고자 합니다. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							조현형			터널건설과장					01/15 권혁대
협조자
시행			토목부-997									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 도시기반시설본부 12층 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02)3708-2566						/전송			02)3708-2599					/	unclejohh@seoul.go.kr												/	대시민공개