문서번호	도로보수과-494
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		이석재	01/18 노영석
협 조

차도관리 혁신단 실무연구 계획

(저소음 아스팔트 포장 적용방안 연구)

2016. 1.

북부도로사업소

(도로보수과)

차도관리 혁신단 실무연구 계획

(저소음 아스팔트 포장 적용방안 연구)

차도관리 혁신 실무와 관련 우리사업소 저소음아스팔트포장 적용방안 연구과제를 선정, 세부 추진계획을 수립·시행하고자 함.

1	추 진 근 거

❍ 차도관리 혁신단 구성·운영 계획 (도로관리과–6112, 2015.12.16.)

- 내  용        : 각 사업소별 실무 연구계획 수립

- 연구과제 선정 : 저소음 아스팔트 포장 적용방안 연구

- 혁신단 구성   : 서울시, 사업소, 서울시 품질시험소, 외부전문가, 시민

2	추 진 계 획

❍ 저소음 포장 현황 (2011년 이후)

포장시기	위치	규 모			공사비 (백만원)	소음측정결과(dB)		배수시간(초)
		폭(m)	연장(m)	면적(a)
						시공전	시공후	시공후	현재
			2,250	512	2,127
2011.7.	주공909동~대진고사거리	20	40	97	397	70.1	66.2	4	19
2011.8.	삼환아파트~누원초교사거리	19~22	750	130	533	67.8	62.5	4	15
2013.6.	순복음교회~당현2교	22	460	105	441	71.5	66	6	10
2014.10.	한천초교~월계1지하차도	18	1,000	180	756		66.3	5	13

※ 포장 전후 소음측졍 결과 약 5 dB 정도 소음 감소

※ 배수시간 기준 : 10초 이내 (400㎖ 물이 측정기구에서 포장체로 빠져 나가는 시간)

※ 저소음 포장 : 노면과 타이어와 접촉음을 공극에서 흡수하여 소음저감(3~4dB)

강우시 배수기능 확보로 차선 시인성 확보 및 미끄럼 저항 증대

❍ 저소음 포장 개요도

일반아스팔트 포장		저소음·배수성 포장
	← 표층 →
	← 중층 →

❍ 문제점

- 차선변경(제거 및 재도색) 반복에 따른 파손 사례 발생

- 염화칼슘에 대량 살포에 따른 포장체 내구성 저하

- 포장체 공극에 이물질이 누적되어 소음 감소 및 배수 기능 상실

- 중차량 하중으로 인한 유공관 손상 및 포장체(중층)에 물고임 발생

- 소규모 도로굴착 복구시 재료 수급이 어려움

❍ 연구방안

- 내구성 및 적정 공극율 확보를 위한 골재 및 바인더 규격 연구

- 포장체 공극율 유지를 위한 이물질 흡입 등 청소방안 강구

- 차로폭 변화에 따른 유공관의 규격, 강도, 재질 강구

- 배수가 용이하도록 중층 구조체 횡단경사 단면 연구

- 아스콘 조합과 연계한 소규모 자재 조달방안 강구

- 기타 저소음 포장 시공 및 유지관리에 필요한 사항

❍ 추진 일정

- ‘16. 01.        : 계획 수립 및 혁신단 구성

- ‘16. 01. ~ 4.  : 저소음 포장재 및 유지관리 방안 조사 연구

- ’16. 05. ~ 7.  : 실무연구과제 자문회의 및 성과 보고회 개최

- ’16. 08. ~ 9.  : 시험포장 위치 선정 및 시공

- ‘16. 10. ~ 9.  : 저소음 포장 구간 소음 및 배수 효과 분석

· 포장 전·후 및 청소 실시 전·후의 소음저감 및 배수성능 비교 분석

- ‘16. 11. ~     : 시공효과 분석 및 검증결과 보고회 개최

3	세부 추진계획

❍ 저소음 포장재 및 유지관리 방안 조사 연구 : 2016. 1. ~ 4.

- 저소음 포장 사례 및 효과 조사

- 저소음 포장재 현황 조사 및 배합설계 등 검토

· 유공관 규격 및 재질, 골재, 바인더 플랜트 생산 방식 등

- 저소음 포장 관련 규정 자료 조사

- 저소음 포장 유지관리 방안 연구 (청소 장비, 사례 등)

- 저소음 포장 현장시공 위치 선정 및 공사 발주

- 조사 자료 정리 및 보고

❍ 실무 연구과제 관련 자문회의 및 결과 보완 : ’16. 05.~7. (2회)

- 참 석 자 : 차도관리혁신단

- 자문내용 : 저소음 포장 연구결과 보완사항 자문

❍ 실무연구 결과 중간 보고 : ’16. 7. (도로관리과)

❍ 저소음 포장 현장 시공(예정) : ’16. 9.

- 자문회의 등 참조하여 위치 및 규모, 시공 방법 등 결정

- 현장시공시 혁신단 참관

❍ 저소음포장 구간 공용성 평가

- 소음 측정     : 공식 시험기관 의뢰 (연2회, 서울시 보건환경연구원)

- 배수능력 시험 : 자체 시험기구 활용 조사(연2회)

- 도로상태 평가 등 공용성평가 : 도로관리과 및 품질시험소 의뢰 (연2회)

4	행 정 사 항

❍ 차도관리 혁신단 구성

구 분	공 무 원	외부전문가	시민
역 활	사 업 소 장 : 과제연구 총괄관리 도로보수과장 : 과제연구 총괄관리 이 화 신 : 도로포장 담당 이 진 욱 : 도로포장 연구센터(전문요원) 이 옥 휘 : 차도포장 총괄 담당	문성호(서울과학기술대학교), 이수형(한국건설기술 연구원) 황의윤(SK에너지)	정인홍(방학동) 김용석(남양주)

❍ 연구결과 보고 : 연구 종료시(도로관리과).  끝.