문서번호	어르신복지과-1005
결재일자	2016.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		어르신시설팀장	어르신복지과장
서세환		손수달	01/18 박기용
협조

『서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)』(1차 계약변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

어르신복지과

『 서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)』(1차 계약변경)

서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)와 관련하여 쉼터 바닥마감재 변경자재 주문생산 수급지연에 따라 계약변경(공사기간 연장)하여 공사에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서남권 어르신돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)

○ 공사위치 : 구로구 구로동 98-5(구, 영등포수도사업소 청사)

○ 공사규모 : 213.88㎡(지하층 97.3㎡, 4층 116.58㎡)

○ 계약업체 : 대진건설 대표 조규진

○ 계약기간 : ‘15.12.17 ~ ’16.1.20

○ 계약금액 : 금93,094,000원

□ 추진 경위

○ ‘15.09.07. : 제2호 어르신돌봄종사자종합지원센터 설치계획(방침)

○ ‘15.11.06. : (구)영등포수도사업소 청사 개보수계획(방침)

○ ‘15.11.30. : 공사시행(방침)

○ ‘15.12.17. : 공사계약

○ ‘16.01.08. : 공사 실정보고

- 지하층(쉼터) 바닥마감재 변경(3.8㎜중보행용탄성시트 → 4.5㎜럭스코트(우드)) 등(공사비 증액 없음)

○ ‘16.01.15. : 공사기간 연장요청(대진건설)

□ 계약변경(1차) 주요내용

○ 계약변경 내용

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	93,094,000원	93,094,000원	변경없음
계약기간	‘15.12.17~’16.1.20	‘15.12.17~’16.1.27	7일 연장

○ 변경사유

- 지하층(쉼터) 바닥마감재 변경(3.8㎜중보행용탄성시트 → 4.5㎜럭스코트(우드))에 따른 주문생산 자재 수급 지연으로 절대공기 부족

※ 공사 실정보고서(어르신복지과-456호 2016.1.8.)

○ 계약금액 : 변경없음(금93,094,000원)

- 어르신복지과 34,445,000원, 자산관리과 58,649,000원

○ 예산과목

- (복지본부 어르신복지과)어르신 복지수준 향상 및 장사시설 운영 내실화, 독거․재가어르신 종합서비스 확대, 재가노인복지시설 운영, 민간대행사업비(402-02)

- (재무국 자산관리과)국․공유재산의 체계적관리, 시유재산의 체계적관리, 국․공유재산의 효율적인 매각 및 관리, 행정수요대비공유재산확보, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 공사실정보고서(어르신복지관-456, 2016.1.8.)

2. 연기요청서 1부.  끝.