문서번호	소방행정과-795
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김현태	천완주	윤봉수	01/18 김송연
협 조

- 고척119안전센터 청사관리 및 현장출동대원의 근무환경 개선을 위한 -

소방청사 벽면마감재 교체 및 환경개선보수공사 계획

2016.  1.

구로소방서

(소방행정과)

- 고척119안전센터 청사관리 및 현장출동대원의 근무환경 개선을 위한 -

소방청사 벽면 마감재교체 및 환경개선 보수공사 계획

서울디자인심의대상 및 소방청사의 효율적 관리를 위하여 내부 벽면마감 재료를 대리석타일로 시공하였으나, 습식부착방식으로 내·외부 기온차로 대리석타일의 팽창으로 탈락되어 청사관리 및 현장출동 중 안전사고 등  불편을 주는 시설을 개선 하고자함

Ⅰ		일반현황

	사업대상	:	구로소방서 고척119안전센터
	사업위치	:	서울시 구로구 고척로 195
	청사현황	:	철근콘크리조 3/1층 769.68㎡(준공 2012. 11. 12.)
	사업기간	:	2016. 1. 20. ~ 2016. 2. 05.
	사업규모	:	2, 3층 계단내부 외측 벽면, 2층 대기실 복도 벽면 마감재
			대리석 타일 87㎡ 철거 및 재부착
	사업비	:	금14,200천원
	근무여건	:	총원 28명 24시간 3교대근무(센터장 1명 일근근무)
	관련근거	:	고척119안전센터-104(2016.1.14.)호『청사 환경개선 보수 요청』

Ⅱ		추진계획

	철거공사	:	고척119안전센터 벽면마감재 대리석타일 87.00㎡철거
	● 1, 2, 3층 계단벽면 55.55㎡(1, 2, 3층 계단 일부) ● 2, 3층 복도벽면 31.45㎡
	가설공사	:	계단 및 복도 비계작업(발판 판넬 설치 포함)
	교체공사	:	1, 2, 3층 계단 등 미철거 부분을 고려하여 현 대리석타일과 색상이 비슷한 대리석타일로 교체

공정별 현장사진

▣ 벽면대리석타일 현장사진	▣ 사유 및 개선내용
	◈ 계단실 등 벽면대리석타일 탈락 ● 개선사유 - 복도 및 계단실 등 벽면 대리석타일의 탈락 계단으로 떨어지면서 계단 대리석 파손 및 현장출동 중 안전사고 발생 우려가 있음 - 타일탈락 파손으로 유리창 등 2차 피해발생 119안전센터 방문 민원인의 불편초래 및 공공청사 건축물의 손상으로 청사 미관저해 ● 개선계획 - 1, 2, 3층 계단실 외측 벽면 대리석타일 철거 - 철거한 벽면 기존 모르터바름 부분 철거 및 면 고르기 후 ※철거 및 시공은 사무실 등 현장출동업무 지속성을 위하여 계단 출동로 확보 후 시행 - 철거 및 공사에 따른 먼지 등에 의한 시설 고장 방지를 위한 먼지비산 비닐설치 후 작업 - 벽면에 부착된 대리석타일의 규격이 600*600 대형 타일로 보수 후 하자발생 방지를 위하여 타일 2장 부착 사이마다 종과 횡으로 스텐 또는 신주 등의 미관을 감안한 재료분리대 사용 시공 - 타일부착 시공 후 벽면의 타일 부착 면과 타일이 완전히 굳을 때까지 타일을 보호할 수 있는 부속물로 고정하여 현장출동 시 타일에 손상이 가지 않도록 보양시설 설치 - 타일압착 부분의 굳은 결과에 따라 보양시설 철거 청소 후 사용 ※ 차후 하자발생 방지를 위하여 부착 방법을 압착 떠붙임을 석재용 에폭시 사용

Ⅲ		예산현황

	소요예산	:	금14,200천원

	공정별예산
	●철 거 공 사	:	783,000원
	●가 설 공 사	:	1,267,700원
	●복 합 타 일 공 사	:	10,167,000원
	●폐기물처리등	:	514,410원
	● 공사원가 12,914,410원 × 부가세 10% = 14,205,851원

Ⅳ		계약추진

	계약방법	:	수의계약
	행정자치부 예규 제35호『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제5장 수의계약 운영요령 및 훈령 제332호 『지방자치단체 원가계산 준칙』제3장 제2절 규정에 의거 엔지니어링 사업대가기준규정이하 최저가 견적 제출한 전문업체와 국가종합전자조달(g2b)프로그램활용『전자수의시담 계약』

Ⅴ		추진기간

	자료조사	:	2016. 1. 15. ~ 2016. 1. 18.
	기본계획	:	2016. 1. 18. ~ 2016. 1. 18.
	계약	:	2016. 1. 19. ~ 2016. 1. 20.
	공사착공	:	2016. 1. 21. ~ 2016. 1. 31.
	공사준공및검사	:	2016. 1. 31. ~ 2016. 2. 05.

붙 임 : 고척119안전센터 청사 환경개선 보수 요청 1부.  끝.