문서번호	토목부-1287
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		명경출	01/22 노우성
협조
	주무관		이석우

정산 설계변경(6차2회) 검토보고

(용비교~행당여중간 도로개설공사 전면책임감리용역)

2014. 1

도시기반시설본부

(토  목  부)

정산 설계변경(6차2회) 검토 보고

(용비교~행당여중간 도로개설공사 전면책임감리용역)

『용비교～행당여중간 도로개설공사 전면책임감리용역』을 추진하면서 동절기 공사추진으로 원활한 감리업무 수행을 위해 선투입한 감리비에 대한 준공전 정산 설계변경 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-22440(‘13.12.4) “감리용역 준공기한 연기 검토보고”

○ PH14-용행감-020호(2014.01.21) “감리용역 6차2회 정산설계변경 검토보고”

Ⅱ		용역개요

○ 위    치 :  성동구 금호동 용비교 북단 ~ 행당동 행당여중

○ 규    모 :  도로확장 및 개설 L=719m, B=확장5.2m(전체 26.4m)

○ 사업기간 : 2007.01.10 ～ 2015.01.31

○ 용 역 비 : 2,310,140천원

○ 용 역 사 : 평화엔지니어링외 1개사

Ⅲ		정산 설계변경 내용

○ 설계변경 현황                                   (단위 : 천원)

구분	용 역 비		계 약 기 간		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경
6차2회	350,000	396,000	2013.01.30~ 2014.01.29	변경없음

○ 설계변경 사유

- 당초 ‘13.12.09. 용역준공 예정이었으나 동절기 공사추진에 따른 감리업무 수행을 위하여 준공기한 연기후 2013년 감리비 예산범위 내에서 선투입한 감리비 반영

Ⅴ		조 치 의 견

○ 상기 내용과 같이 감리용역에 대한 설계변경을 시행하여 준공코자 함.

붙  임 : 1. 설계변경 내역서(6차 2회) 각 1부.  끝.