서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축공사 추진사항 알림

1. 토목부-991호(2016.01.15, 강남순환도시고속도로 교통관리시스템 관련 협조 요청)과 관련입니다.

2. ‘강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축공사’는 일찰공고(‘15.11.11)를 거쳐 ’15.12월중 착공코자 하였으나, 적격심사 과정에서 입찰 참여업체의 이의제기로 계약체결이 지연되고 있습니다. 우리부서에서는 이의제기 사항을 신속히 해결하고 당초 예정대로 도로 개통전 교통관리시스템 구축이 완료될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다다만, 이의 해결과정에서 당사자간 법적대응도 배제할 수 없는 상황이 예상되는 등 예정대로 공사가 추진되기는 어려울 것으로 판단됩니다.

3. 따라서 현재로서는 교통관리시스템 구축 공사가 도로개통시기(2016.5.19 예정)에 맞추어 완료하기에는 어려울 수도 있음을 알려 드리니 각 부서의 관련 공정에 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업과 관련하여 변경사항이 있을시 추후 별도 통보하여 드리도록 하겠습니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도로계획과장,서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),강남순환도로(주) 대표이사
주무관	김상곤		도로정보팀장	최종선		교통정보과장	01/18 이경순
협조자
시행	교통정보과-937	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28(종로소방서 5층)	/
전화	02-2133-4963	/전송	02-2133-4990	/	sgkim1@seoul.go.kr	/	대시민공개