문서번호	물재생시설과-977
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
임두선		강재천	01/22 김병위
협조
	계약1팀장		김점선

『서남물재생센터 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사』

음폐수 저장조 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

도 시 안 전 실

(물재생시설과)

『서남물재생센터 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사』

음폐수 저장조 납품기한 연기 검토보고

『서남물재생센터 제1처리장 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사』와 관련하여 선행공정인 음폐수 투입배관 등 선행공정 지연으로 관급자재(음폐수 저장조) 납품기한 연기 검토 사항임

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사

○ 시설용량 : 음폐수 300톤/일 하수병합 처리

○ 사업내용

- 음폐수 투입설비 : 투입실(20m×15m) 1동, 저류조(150㎥) 1조, 이송설비 1식

- 악취방지시설 : 탈취기(100㎥/분×1대, 400㎥/분×1대), 탈취포집배관 1식

- 전기 및 제어설비 : 조작반, 제어반, 케이블 설치 1식 등

○ 사업비 및 계약현황

사 업 명	계약금액(천원)	계약자	공사 및 납품기한	공정
계	1,624,825			76.3%
음폐수 투입 및 악취 방지시설 설치공사	626,790	청광종합 건설(주)	‘13.10.22 ‘14.02.21	65%
음폐수 투입 및 악취 방지시설 전기공사	139,830	㈜혜성 이티에스	‘13.10.30 ‘14.02.26	75%
탈취기 제작구매설치	684,535	동진에코텍	‘13.12.02 ‘14.02.10	70%
음폐수 저장조 제작 구매설치	173,670	㈜용진기전	‘13.11.26 ‘14.01.25	95%

□ 관련근거

○ ㈜용진기전 2014-1-16호(‘14.1  ) : 납품기한 연기요청

○ 물품계약 일반조건 7절. 2 : 계약기간 연장

□ 요청사항

○ 납품기한 연기 : 당초 ‘14.01.25 ⇒ 변경 ’14.02.21

○ 연기사유 : 선행공정인 음폐수 투입시설 지연으로 시험운전 불가에 따른 연기

○ 계약금액 : 변경 없음

□ 검토내용

○ 납품기한 연기

건명	납품기한		비 고
	변경 전	변경 후
음폐수 저장조 제작구매설치	'14. 01. 25	'14.02.21	증)27일

- 변경일자 선정 : 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사 일정과 동일

○ 연기사유 : 선행공정인 음폐수 투입시설 지연으로 시험운전 불가

○ 계약금액 및 수량 : 변경 없음

○ 지연배상금(지체상금) 부과여부 : 미부과

- 미부과 사유 : 물품계약 일반조건 7절 1. 지연배상금 다항 4)호 “계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체(선행공정 지연)

□ 조치의견

○ 검토내용과 같이 음폐수 투입 및 악취방지시설 본공사와 일정을 동일하게 연장하고 변경기한 내 선행공정이 완료시 시운전 결과에 따라 납품검수 처리하고자 함

붙임 : 납품연기 요청공문(납품연기 동의서, 설치사진 포함)  1부.  끝.