문서번호	시설관리과-1554
보존기간	년
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정수용	김근용	이자원		01/19 이인걸
협 조
	주무관		이상엽

『마곡구역 도시개발산업 3공구 기반시설조성공사』구간

저촉 상수도 이설공사 점검 계획

2016. 1

강서수도사업소

『마곡구역 도시개발산업 3공구 기반시설조성공사』구간 저촉 상수도 이설공사 점검 계획

SH공사에서 시행중인 『마곡구역 도시개발산업 3공구 기반시설 조성공사』구간 저촉 상수도관 이설공사에 대한 공사 추진상태를 점검하고 문제점 발견시 이를 개선 조속한 업무 추진을 위한 점검계획을 보고드림

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 마곡구역 도시개발산업 3공구 기반시설 조성공사

○ 공사기간 : ‘15. 2 ~ ’17. 2월

○ 공사규모 : 우수암거 및 교량 설치

- 우수암거 : 4련 □5.0✕2.0m, L=0.971㎞

- 교    량 : 40✕50✕10.8m

○ 시 행 청 : SH공사

▢ 상수도 이설 현황

○ 위    치 : 양천길(마곡지구 3공구)

○ 이설사유 : 신설 우수암거 및 교량 구간에 상수도관 저촉

○ 이설개요 : D=300~D1500㎜, L=895m

▢ 상수도 이설 진행현황

○ ‘15.3~10    : 양천로 우회도로 건설

○ ‘15.10~’16.1 : 우수관로 하월을 위한 가시설공사 완료

○ ‘16.1 ~     : 상수도 신설관 부설 및 기존관 연결 등

▢ 점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 1 ~ ’16. 12월

○ 점 검 자 : 사업소장 외 3인

○ 점검방법 : 붙임)현장점검표에 의거 수시 점검

○ 점검내용

- 시공분야 : 토공, 관부설 상태 및 심도 등

- 자재관리 : 자재적치, 강관자재(RT검사) 등

- 안전관리 : 안전휀스, 교통정리원, 안내간판, 안전모, 작업복 등

- 시민불편 : 공사분진(물청소 여부), 잔토 등 방치 여부 등

▢ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 중대한 사항은 해당 부서에 공문으로 보완 요청

▢ 행정사항

○ SH공사에 상수도 이설공사 현장점검계획 통보

붙임 : 1. 현장점검표 1부.

2. 이설계획평면도 1부.  끝.