함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	물품 납품기한 연기에 따른 변경 계약의뢰(폴리우레아수지 구매)

1. 재무과-1292(2016.1.11.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소와 물품계약 체결된 아래 계약건에 대하여 납품기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재구매(폴리우레아수지도막방수재)

나. 계약업체 : **************

다. 계약금액 : ************

라. 납품기한 :

- 당초 : 2015.12.24.~2016.01.23

- 변경 : 2015.12.24.~2016.05.15

붙  임 : 1. 방침서 및 계약서류 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	유명수		시설관리과장	전결 01/19 이승철
협조자
시행	시설관리과-1996	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동 2가)	/
전화	02)3146-2204	/전송	02)3146-2239	/	yms1903@seoul.go.kr	/	부분공개(5)