문서번호	도로계획과-933
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		간선도로계획팀장	도로계획과장
박재현		김기용	전결 01/22 형태경
협 조

「노량진배수지 도로구조개선사업」 타당성조사 및 기본계획 용역 설계변경(정산) 검토 보고

2014. 1.

「노량진 배수지 도로구조개선사업」 타당성조사 및 기본계획 용역

설계변경(정산) 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

노량진 배수지 도로구조개선사업 타당성조사 및 기본계획과 관련하여 설계변경 (정산)요청에 대한 검토 보고임

용역개요

○ 용 역 명  : 노량진 배수지 도로구조개선사업 타당성 조사 및 기본계획 용역

○ 규    모

- 연장 L = 100m, 폭원 B = 3.5m (노들길 좌회전차로 추가 확보)

○ 용역기간  : ‘13. 4. 30 ~ ’14. 1. 31

○ 계 약 자  : ㈜동일기술공사 대표이사 김수보

○ 계약금액  : 28,546천원

보고 내용

○ 설계변경 : 당초28,546천원 → 변경 28,346천원(감200천원)

구 분		금 액	증 감
총 용 역 비	당 초	28,546,000원	감 200,000원
	변 경	28,346,000원
공급가액	당 초	25,496,364원	-
	변 경	25,496,364원
부가가치세	당 초	2,549,636원	-
	변 경	2,549,636원
자문회의비	당 초	500,000원	감 200,000원
	변 경	300,000원

- 사유 : 자문비 실정산에 따른 용역비 감액

향후 추진계획

○ '14. 1월 : 변경 계약 및 용역 준공

붙임 : 1. 관련 공문 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.