서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰

1. 버스정책과-822호(2016.1.14.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 “2015년 가로변정류소 이용환경개선공사(전기공사 포함)에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기대상 공사명 : 총 2건

계약건명	계약금액	계약자	준공기한
2015년 가로변 정류소 이용환경개선공사	￦688,892,260	㈜디자인메소	2016.2.29
2015년 가로변 정류소 이용환경개선 전기공사	￦26,437,730	덕립전기㈜	2016.2.29

나. 준공기한 연기내역 : 당초)2016.2.29.→변경)2016.4.30

다. 귀책사유 : 서울특별시

붙임 1. 준공기한 연기방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 각1부.(총2부).  끝.

	버스정책과장
★주무관	이오수		정류소관리팀장	정순종		버스정책과장	01/20 이상훈
협조자	계약1팀장	김점선
시행	버스정책과-1253	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	대시민공개