함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역계약기간 변경요청

1. 서울혁신파크 공간조성 마스터플랜 용역에 대하여 아래와 같이 용역기간 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 서울혁신파크 공간조성 마스터플랜 수립용역

나. 계약자 : 정림건축사사무소, 동해종합기술공사, 평화엔지니어링

다. 용역기간

- 당초 : ‘13. 9. 2 ～ ’14. 1. 29 (150일)

- 변경 : ‘13. 9. 2 ～ ’14. 2. 18 (170일) [20일 연장]

라. 계약금액 : 금142,560,000원

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 보고서 1부. 끝.

	사회혁신담당관
주무관	최홍규		혁신기반팀장	노수임		사회혁신담당관	01/22 배형우
협조자
시행	사회혁신담당관-647	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 (신청사 2층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-6314	/전송	02)2133-0744	/	fromk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)