문서번호	급수운영과-1736
결재일자	2016.1.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장	동부수도사업소장
박상열	오기석	01/20 홍현구
협 조

『2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)』

설계변경 및 계약금액 조정시행(최종)

2016.01.

동부수도사업소

『2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)』

설계변경 및 계약금액 조정시행(최종)

우리사업소에서 시행중인「2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)」의 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 설계변경 심의를 본부에 요청하여 효율적인 예산집행과 적정한 공사집행을 도모하고자 함.

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명：2015년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

**************************************

************************

********************************

*************************강락위

*************************

Ⅱ		보고내용

❍ 설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 신축건물 증가에 따른 벽체계량기 설치 물량 변경

- 동파방지용 보온재 교체물량 증가에 따른 변경

- 건강,연금,노인장기요양보험료 및 부지임대료 정산에 따른 변경 등

❍ 실시공 수량 변경 내역

- 신규공종 및 신규자재 발생

· 신규공종 : 새들분수전 잠금 15mm 외 16개 공종

· 신규자재 : 누수방지새들 80/80mm 외 4종

- 시공물량 증·감 현황

· 물량증가 : 인력터파기(견질 0-1m, 지세할증) 외 61개 공종

· 물량감소 : 콘크리트포장절단(100~150mm, 지세할증) 외 48개 공종

- 공종별 변경현황                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
토 공	94,921,332	117,541,807	증) 22,620,475
부 설 공	120,943,688	158,773,964	증) 37,830,276
구조물공	6,371,486	953,812	감) 5,417,674
포 장 공	8,128,277	5,863,138	감) 2,265,139
부 대 공	61,589,925	63,235,207	증) 1,645,282
사급자재비	122,219,920	125,184,821	증) 2,964,901

❍ 공사금액 변경 내역                                      (단위 : 원)

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	증·감	비 고
도 급 비	644,600,350	707,919,000	****63,318,650
공급가액	586,000,319	643,562,728	****57,562,409
부가가치세	58,600,031	64,356,272	**** 5,756,241

❖ 계약금액 조정심사

- 심사기관 : 상수도사업본부 요금관리부 재무회계과

- 대상기준 : 연간단가계약공사 도급비 증액 시

- 관련근거 :『'16년 상수도사업 설계심사 추진계획』【재무회계과-268호(‘16.01.07)】

Ⅲ		조치의견

❍ 위와 같이 설계변경 및 계약금액 조정 사항이 발생되었으며

❍ “2015년 광진구 상수도공사(연간단가계약)”의 도급비가 증가되어 설계변경 심사대상이므로 상수도사업본부(재무회계과)에 공사계약(설계변경) 심사의뢰코자 합니다.

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.