투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	목동교성능개선공사 건설사업관리용역 책임건설사업기술자 윤상현귀하
(경유)
제목	『목동교 성능개선공사』 수목이식공사 단가 협의 의견 회신

1. 한국종합(목동교) 제2016-12(2016.1.20.)호와 관련입니다.

2. 「수목이식공사」 관련 신규비목에 대한 도심지 공사의 특성상 작업능률저하 및 이식 수량이 적고 이식장소가 분산되어 있어 투입비 과다 발생의 어려움으로 시공사의 협의단가 100% 반영 요구에 대하여 우리본부 의견은 낙찰율(81.3965%)로 적용토록 회신합니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	01/21 임춘근
협조자
시행	방재시설부-985	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8796	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개