문서번호	누수방지과-801
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이동욱	김영삼	01/22 강신재

『2015년』노후 상수도관 정비공사 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1. 26.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2015년도』

노후 배급수관 정비공사 추진실적 보고

2015년도 노후 배급수관 정비공사를 완료하고 추진실적을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 정비목표 : 54㎞

○ 총사업비 : 45,500백만원

- 시설비  1,900백만원, 시설부대비 6백만원

○ 공사기간 : 2015. 3. 1. ～ 12. 31.

○ 세부 추진계획

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표 (㎞)	54	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3	6.5
사 업 비 (백만원)	43,594	8,419	4,096	6,489	4,074	4,751	6,218	4,311	5,236

※ 감리비 1,900백만원, 시설부대비 6백만원 제외

□ 추진실적

○ 정비실적 : 55.7㎞

○ 총사업비 : 45,500백만원

○ 세부 추진실적

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표 (㎞)	54.0	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3	6.5
실 적 (㎞)	55.7	10.0	5.3	8.4	5.7	6.4	8.1	5.3	6.5
정비율(%)	102.6	96.2	103.9	103.7	114.0	108.4	105.1	100.0	100.0

□ 향후 정비계획

구 분	소 계	’16년	’17년	’18년
연장 (㎞)	313	75	121	117
사업비 (백만원)	2,807	620	1,113	1,074

□ 행정사항

○ 각종 보고자료 및 통계자료 활용

○ 수도사업소 경영실적 평가에 반영. 끝.